투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	시설과장
(경유)
제 목	물품 변경계약 체결 알림(박물관 승강기 교체 조달구매)

1. 물품매입요구서(시설과-1604호, ’19.4.22.) 및 납품기한 연기의뢰(시설과-1906호, ’19.5.9.)와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 사업에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하였으니 납품기한 내  납품검사원을 제출토록하여 지연배상금이 부과되는 일이 없도록 업체에 안내하여 주시기 바랍니다.

가. 건     명 : 박물관 승강기 교체

나. 계 약 자 : 대성아이디에스(주)(대표 : 최성규)

다. 계약방법 : 조달구매(제3자단가계약)

라. 변경계약일자 : 2019. 5. 17.

마. 변경내용

구 분	계약변경 전	계약변경 후	변경 사유
계약금액	금50,128,000원 ※ 조달수수료 270,690원 별도	좌 동	-
계약기간	2019.4.29. ~ 2019.6.28.	2019.4.29. ~ 2019.7.31. 납품기한 연장	한국승강기안전공단 안전인증 지연

붙임 : 1. 분할납품변경요청응답서 1부.

2. 분할납품요구및통지서 1부.  끝.

	총무과장
주무관	김나훈		주무관	김영수		총무과장	05/17 김춘섭
협조자
시행	총무과-5201	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	http://www.museum.seoul.kr
전화	724-0118	/전송	724-0241	/	nahoon@seoul.go.kr	/	부분공개(7)