문서번호	급수운영과-9140
결재일자	2019.5.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장	서부수도사업소장
김용만	전성호	이병운	05/17 代한병주
협 조

2019년 마포구 관내 상수도 시설물 유지관리공사(장기계속) 발주계획 보고

2019. 5.

서부수도사업소

2019년 마포구 관내 상수도시설물 유지관리공사 발주계획 보고

노후밸브 정비 및 배수지 ․ 가압장 시설물 유지관리를 위한 상수도공사를 발주하여 최적의 시설물 관리상태를 유지하고자 합니다.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2019년 마포구 관내 상수도시설물 유지관리공사(장기계속단가계약)

□ 공사개요 : 노후밸브 및 밸브실 정비 157개소 및 배수지 환경정비

◦ 상수도 시설물(밸브, 배수지, 가압장)의 안정적 상태 유지를 위한 보수공사

□ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2020. 06. 30. 까지

□ 발주예정 금액

◦ 총 공 사 비 : ************

◦ 도  급  비 :  ************

◦ 관  급  비 :   ***********

◦ 도로복구비 :  ************

※ 공사관련 2019년 예산현황 : 2,747,000천원(사업소 전체)

☞ 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후밸브) : 2,143,000천원

☞ 상수도사업비,영업비용,배급수비,기타교체비(환경정비) :  604,000천원

□ 관련근거

◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제24, 25조(단가계약)

◦ 계약심사 결과통보 본부 안전총괄과–5160(2019. 5. 16.)

Ⅱ		추진경과

□ 예정물량 산출

◦ 최근 3년치(2016~2018년) 물량을 근거로 예정물량 산출

□ 추진경과 (설계내역 작성 및 설계심사)

설계서 작성(2019. 04월)			․‘2018년 마포구 관내 상수도시설물 유지관리공사(장기계속 단가계약)의 계약금액 도래. (’19. 06월 중 도래 예상) ․ 3년 평균물량 산출하여 설계내역 작성
	□
			․ 심사의뢰 : 본부 안전총괄과 의뢰 - 관련대호 : 급수운영과-8557(19.5.10.) - 심사요청 금액(도급액) : *********
공사설계 심사의뢰(본부)
	□
			․ 관련대호 : 안전총괄과-5160호 결과 통보 ․ 심사결과 금액 : *******************
심사결과 통보

□ 주요 심사 내용

◦ 단가 조정

- 터파기(불량, 보통) : 굴삭기(0.18, 0.6) 지세할증 제외

◦ 수량 조정

- 파쇄물, 잔토 운반 및 처리 수량 조정

- 재활용플라스틱 벽관 설치 수량과 일치

◦ 부지임대료 조정

- 평균공시지가 → 최저공시지가 적용

□ 심사 결과

(단위 : 천원)

사 업 명	심사요청액	심사금액	감 액	비고
2019년 마포구 관내 상수도시설물 유지관리 공사 (장기계속단가계약)	*******	*******	*******

Ⅲ		향후추진계획

□ 추진일정

□ 공사 발주 및 계약의뢰  : 2019. 5. (사업소 → 본청 재무과)

□ 일반공고 및 계약  : 2019. 5. ~

□ 공 사 착 공 : 계약일로부터 일주일 이내

붙  임 : 1) 관련공문(계약심사 결과) 1부

2) 설계심사 검토서 1부

3) 설계내역서(심사완료) 1부

4) 공사현장설명서 1부

5) 공사시방서 1부.  끝.