투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통신호기 원인자부담공사 변경승인 통보「KT신사호텔 공사중 교통안전시설물 설치공사(신호)」

1. KT estate 개발사업2019-110호(2019.04.25.) 및 서울특별시지방경찰청 교통관리과-15001호(2018.06.20.)와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내에서 시행하는 KT신사호텔 공사중 교통안전시설물 설치공사 준공일 변경승인 요청에 대하여 원인자 준수사항 및 승인조건 사항을 이행하는 조건으로 승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 관련 유관기관에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : KT신사호텔 공사중 교통안전시설물 설치공사(신호)

나. 공사위치 : 강남구 신사동 603번지

다. 공사기간 : 승인일 ~ 2019. 05. 30.

라. 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공 사
신 호	KT estate	건영이앤씨㈜	㈜협우지여 엔지니어링	건영이앤씨㈜

마. 변경사항 : 토목공사 지연에 의한 공사기간 연장

구 분	원 인 자	당초 준공일	연기 요청일	비 고
신 호	KT estate	~2018.08.30	~2019.05.30

바. 승인조건

1) 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음

2) 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인 서류를 제출하여야 하며, 변경사항(교통안전시설         심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함

3) 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등, 가로등) 설치 및 지주내 가로등 안정기실과            신호 점검구는 별도 분리 설치

4) 음향신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이 없도록 설치

5) 교차로 및 단일로 횡단보도상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형) 신설

6) 교통신호제어기 인입전선, 통신(전송)선 및 신호케이블은 지중화 시공하여야 하며, 각종 전선 및 케이블은 누전 및 감전예방을 위하여 중간접속 절대 금지

7) 지중케이블 공사시 도로횡단 구간은 강관전선관 시공

8) 기타 사항은 경찰청「교통신호기 설치·관리 매뉴얼」, 서울특별시「교통신호기공사 업무처리 가이드라인」, 「서울시 교통신호지주 표준도면」준수사항 이행 철저

9) 교통신호기 주요자재(제어기, 교통신호등 등)는 제작일로부터 3개월 이내의 자재 사용

10) 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

붙임  1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 1부

2. 설계내역서 1부

3. 설계도면 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	KT estate,서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울강남경찰서장(교통과장),(주)협우지여엔지니어링,건영이앤씨(주)
주무관	이동훈		기전과장	05/17 정판식
협조자
시행	기전과-3633	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0366	/전송	02-2040-0365	/	behappy6643@seoul.go.kr	/	부분공개(5)