문서번호	설비부-7279
결재일자	2019.5.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축설비과장	설비부장
김진수		代이강욱	05/17 임정규
협조

『돈화문 민요박물관 건립 통신공사』

준공기한 연기 검토보고(총차 및 2차)

2019. 05.

도시기반시설본부

( 설  비  부 )

『돈화문 민요박물관 건립 통신공사』

준공기한 연기 검토보고(총차 및 2차)

『돈화문 민요박물관 건립 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 준공기한 연기 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

□  공 사 명 : 돈화문 민요박물관 건립 통신공사

□  위    치 : 서울특별시 종로구 와룡동5-9의 2필지

□  규    모 : 지하 2층 / 지상 1층(연면적 1,384.82㎡)

□  공사기간 : 2018.01.10. ~ 2019.07.09.

□  도 급 비 : 218,967,000원(2차 137,846,000원)

□  감 리 사 : ㈜혜원까치종합건축사사무소

□  시 공 사 : 셀렉트정보기술㈜

2		관련근거

□ 혜원돈화 제2019-149호(`19.05.15) 통신 공사기한(총차 및 2차) 연장 요청

3		검토내용

□ 준공기한 및 납품기한 연기사유

○ 선행공정(건축)의 공사지연으로 공사기간 변경

□ 준공기한 변경사항

구분	차수	당초	변경	증·감	비고
공사기간	총 차	`18.01.10 ~ `19.07.09	`18.01.10 ~ `19.08.31	증 53일
	2 차	`19.04.26 ~ `19.07.09	`19.04.26~ `19.08.31	증 53일
도 급 비	총 차	218,967,000	218,967,000	변경없음
	2 차	137,846,000	137,846,000	변경없음

□ 연기에 따른 귀책소재 : 발주처

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

□  관급자재 납품기한 변경사항

계약업체	품명	납품기한		증·감	비고
		당초	변경
㈜에이디엠	방송설비(전관방송외)	`19.07.09	`19.08.31	증 53일	금액변경 없음
㈜에이디엠	방송설비(AV설비)	`19.07.06	`19.08.31	증 56일
이노뎁(주)	CCTV설비	`19.07.09	`19.08.31	증 53일
그린아이티 코리아	출입통제설비	`19.07.09	`19.08.31
디라직	전원공급장치/랙	`19.07.09	`19.08.31
솔텍인포넷	네트워크스위치	`19.07.09	`19.08.31

4		건설사업관리단 검토의견

□ 「돈화문 민요박물관 건립공사」의 선행공정(건축) 준공기한이 변경에 따라

□  후속공정(통신) 준공기한 및 납품기한 변경함이 타당하다고 판단됨.

5		보고자 의견

□  상기와 같이 기한을 변경하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토보고(통신)관련 문서 1부.  끝.