투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(정산) 계약의뢰 – 여의도샛강 분류부 생태거점 조성 통신공사

1. 우리 본부에서 추진중인 『여의도샛강 분류부 생태거점 조성 통신공사』에 대하여 아래와       같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 여의도샛강 분류부 생태거점 조성 통신공사

나. 공사기간 : 2018. 4. 5 ∼ 2019. 12. 28

다. 도 급 액 : 29,566,860원

라. 도 급 자 : 주식회사 대한종합산전  대표 이섭

마. 설계변경 사유

- 현장여건 변동에 따른 물량 증ㆍ감내역 발생

바. 설계변경 금액                                                     (단위:원)

구 분		당초	변경	증ㆍ감	비고
도급비	공급가액	26,878,964	25,531,259	감)1,347,705
	부가세액	2,687,896	2,553,125	감)134,771
	계	29,566,860	28,084,380	감)1,482,480

사. 예산과목

- 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복, 여의도샛강 생태거점 조성,

시설비

첨부 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경내역서(총차 및 2차)

3.  검증확인서 1부.  끝.

	공원시설과장
주무관	임이환		공원시설과장	05/17 김호규
협조자	총무과장	박병현
시행	공원시설과-1392	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3780-0861	/전송	3780-0745	/		/	부분공개(7)