문서번호	행정지원과-10827
결재일자	2019.5.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리팀장	행정지원과장
방만천		엄태현	05/20 代엄태현
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수’

「청사 내진보강공사」공장검수(댐퍼) 결과보고

2019. 5. 20.

서부수도사업소

【행정지원과】

「청사 내진보강공사」공장검수(댐퍼) 결과보고

「청사 내진보강공사」에 소요되는 주요 제작품의 납품전 공장제작 품질에 대하여 공장제작검수를 시행하고 결과를 보고 드림.

□ 공장검수 개요

○ 공 사 명:「서부수도사업소 청사 내진보강공사」

○ 검 사 일: 2019. 5. 17.(금요일)

○ 검수장소: ㈜DBR동일(부산광역시 금정구 공단동로55번길 28)

○ 검 수 자: 감독)서부수도사업소 *******

감리)**********************

○ 내    용: 자재 반입 전 제품 확인 및 공장 점검

< 공사 개요 >

-. 사 업 명: 서부수도사업소부 청사 내진보강공사

-. 공사기간: 2019. 4. 18.~ 7.16.(90일) ※ 계약일 : 2019.4.16.

-. 계약금액: **********

-. 계약상대자: *********************************

-. 사업내용: 댐퍼 24개소 설치와 수장공사 보수

<공사 추진 일정표 >

추진일정 작업내용	4.18~4.26					4.27.~6.30.					7.1.~7.16.					비고
실측 및 작업준비
제작 및 현장시공
정리, 준공준비

□ 공장검수(CHECK) 결과

○ 중점검점: 자재관리, 공정관리, 제조설비, 제품검사 등 전반적인 사항

○ 검사결과: 댐퍼 설치위치별 실측결과 및 시방서 기준대로 제작되었음.

□ 향후 계획

○ 시공사의 내진보강공사 댐퍼 설치 일정에 따른 설치 승인.  끝.

붙임 : 공장검수(CHECK LIST) 사진 1부.