문서번호	행정운영과-6279
결재일자	2019.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
장태옥		박희복	05/21 이상국
협 조
	기획예산과장			박재희
	재무회계과장			김분숙

「본부 청사 내진보강공사」

석면재 철거에 따른 지정폐기물(석면) 처리계획

2019. 5.  .

경 영 관 리 부

(행정운영과)

「본부 청사 내진보강공사」

석면재 철거에 따른 지정폐기물(석면) 처리계획

「본부 청사 내진보강공사」를 시행하면서 석면건축재 철거에 따른 석면폐기물의 처리계획을 수립하여 공사관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 상수도사업본부 청사 내진보강공사

○ 공사기간 : 2019. 4. 5.~ 8. 2.(120일) ※ 계약일 : 2019.3.28.

○ 계약금액 : **********

○ 계약상대자 : *****************************

○ 사업내용 : 댐퍼 20개소 설치와 내부 수장공사, 균열 보수

<공사 추진 일정표 >

추진일정 작업내용	4.5~4.30					5.1.~5.31.					6.1.~6.30.					7.1.~8.2.					비고
실측 및 작업준비
제작 및 현장시공
정리, 준공준비

□ 석면재 철거작업 계획

○ 물    량 : 88.75㎡

○ 대    상 : 석면재 벽체(마감재)

- 장  소 : 2층 본부장실 일부, 부본부장실 내부 칸막이벽 시공

- 석면재 : 밤라이트(석면함유율 12%)

○ 철거비용 : 내진보강공사 도급비*********에 포함

○ 추진절차 및 계획

석면해체 작업

계획서 수립

(보건규칙 제489조 관련)

석면해체·제거작업

신고서 제출

(서울서부고용노동지청 제출)

석면제거 작업 및 폐기물 배출

(폐기물 수집·운반 처리업체)

⇨

⇨

○ 석면제거 작업계획

- 상  호 : *********************

※ ‘석면해체 제거업’ 고용노동부 ***********

- 서울서부고용노동지청에 “석면해체·작업 신고서” 제출(’19.4.18.)

- 세부 작업시행 방법

‣ 석면안전관리법, 산업안전보건법 규정을 준수 작업시행

‣ 근로자 안전보건교육 실시 및 보호구 착용 후 작업장투입

‣ 작업장 출입 통제 및 경고판 설치 후 철거작업 시행

‣ 작업기간중 석면 비산측정 및 석면 농도측정 실시

□ 폐기물 처리계획

○ 배출량 : 0.9ton

- 고상(07-01-01) : 0.8ton(흩날릴 우려가 없는 폐석면)

- 고상(07-01-00) : 0.1ton(석면제거 작업에 사용된 장갑, 작업복 등)

○ 처리계획 :「폐기물 수집·운반업 허가업체」에 의뢰

- 계약방법 : 수의계약 처리

※ 예산이 소액이고 긴급성을 요함으로 전문업체에 의뢰 신속히 처리

- 처리업체 :***********************

**********************

※ 선정사유 : 폐기물관리법 제25조 제3항 규정에 의한 허가업체로 폐기물 수집운반, 처리 일괄계약 가능업체.

- 처리물량 : 0.9ton

- 용 역 비 : 110만원

- 예산과목 : 자본적 지출, 유형적자산취득, 건물, 시설비및부대비, 시설비(사업명 : 서비스장비확충 및 환경개선)

□ 행정사항

○ 폐기물 처리계획(변경) 신고서 제출

- 서대문구청(청소행정과)에 폐기물 처리 계획서 제출(시공사 제출)

○ 특정폐기물 처리용역 계약의뢰 조치

- 매립장폐기물 처리 위∙수탁 계약서(환경부 서식) 처리

- 법정 서식 활용(甲(위탁자) + 乙(수집운반업체) + 丙(처리업자))

○ 향후, 폐기물 처리 증명서 징구조치

따로 붙임 : 1. ㈜베르데산업 사업자등록증, 수집운반업 허가증 사본 각1부.

2. 매립장 폐기물 처리 위수탁 계약서(서식).     끝.