투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	공사기간 변경 계약의뢰(돈화문민요박물관건립 통신공사(2차), 도급 및 관급)

1. 설비부-7279호(2019.05.17.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 부에서 시행 중인「돈화문민요박물관건립 통신공사(2차)」도급 및 관급자재에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사기간 변경사유

○ 선행공정(건축)공사기간 연장으로 후속공정인 통신공사의 공사기한을 연장하여 원할한 사업을 추진하기 위함 (건축 공사기한 :(총차) ‘19.8.31.)

나. 변경내용

○ 도급                                                                   (단위 : 원)

구 분		변경전	변경후	비고
공사기간	총차	‘18.01.10.~’19.07.09	‘18.01.10.~’19.08.31	증 53일
	2차	‘19.04.26~’19.07.09	‘18.04.26.~’19.08.31	증 53일
공사비	총차	218,967,000	218,967,000	변동없음
	2차	137,846,000	137,846,000	변동없음

○ 관급                                                                   (단위 : 원)

공종별	품대계	납품기한		납품요구번호 (계약번호)	비고
		변경전	변경후
구내방송	98,118,000	2019.07.09	2019.08.31	12-18-2-16770-01 (00177002701)	증 53일
구내방송(추가)	22,801,000	2019.07.06	2019.08.31	12-18-2-45731-00 (00177002701)	증 56일
CCTV설비	49,816,000	2019.07.09	2019.08.31	12-18-2-16780-00 (00177050100)	증 53일
출입통제설비	57,955,200	2019.07.09	2019.08.31	12-18-8-22461-00(00177032303)
전원공급장치/랙	1,373,000	2019.07.09	2019.08.31	12-18-2-16789-00 (00168303608)
네트워크스위치	1,764,000	2019.07.09	2019.08.31	12-18-8-10200-00(00176118501)

붙임 : 검토보고서 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	김진수		건축설비과장	代이강욱		설비부장	05/21 代김오열
협조자
시행	설비부-7351	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)