투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연장 요청[3.1운동 100주년 기념 특별전 전시물 제작설치 용역(2차수)]

1. 총무과-13904(2018.12.31.)호와 관련입니다.

2. ‘서울과 평양의 3.1운동’ 전시 기간의 연장에 따라 관련 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 하오니 협조하여주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 3.1운동 100주년 기념 특별전 전시물 제작설치 용역(2차수)

나. 계약업체 : ㈜일래븐(대표: 임한종)

다. 변경사항

계약금액	당 초	금107,000,000원(금일억칠백만원)
	변경후	금107,000,000원(금일억칠백만원)
	증,감액	없음
계약기간	당 초	2019.1.1. ~ 2019.5.31
	변 경	2019.1.1. ~ 2019.6.14
	증, 감	증 14일

라. 변경사유 : 전시기간 연장

붙임 1. 방침서 1부

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	전시과장
주무관	이진현		전시과장	05/21 정명아
협조자
시행	전시과-864	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	http://www.museum.seoul.kr/
전화	02-724-0146	/전송	02-724-0255	/	harrods49@seoul.go.kr	/	부분공개(7)