문서번호	기전과-4931
결재일자	2019.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		05/22 서승완
협조

『교통안전시설 원인자부담공사(광복교~안양교 확장공사)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

강서도로사업소

(기전과)

『교통안전시설 원인자부담공사(광복교~안양교 확장공사)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    감리사로부터 현장 실정보고서가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

서울지방경찰청 교통관리과-7952(2017.03.24.)호

㈜동림티엔에스 동원.감 제2019-16(2019.05.22.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 광복교 ~ 안양교 도로확장공사

원 인 자 : 도시기반시설본부

공사기간 : 2018.11.01. ~ 2019. 5. 31.

공사장소 : 구로구 구로1 치안센터 주변

공사개요 : 교통신호기 이설(제어기, 지주 교체 포함)

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	주 요 내 용
신호기	㈜동림티엔에스	㈜동림티엔에스	㈜케이씨씨건설	제어기 신설 및 철거 1대 신호등 9조 이설 지주 신설 6본, 철거5본 (지주통합 2본 포함) 신호케이블 등

Ⅲ		실정보고 내용

조건부승인사항 반영 및 현장여건 등을 고려한 물량조정(변경) 등

Ⅳ		변경사유 및 내용

변경사유 및 상세내용

- 지주통합 2본(신호등+가로등 1본, 신호등+CCTV 1본) 반영으로 지주 규격 변경

- 도로(아스팔트) 횡단구간 지장물(하수BOX)로 인원 굴착위치(구간) 변경

- 고장시설, 설계도서 상 오기 물량 수정 반영

주요 변경내역(물량)

※ 붙임의 실정보고서 참조

Ⅳ		검 토 결 과

현장 실정보고대로 설계변경을 승인

Ⅴ		행 정 사 항

실정보고에 대한 승인 및 유관기관 통보

붙임 1. 실정보고서 1부.

2. 내역서 및 설계도면(변경 전후) 각 1부.  끝.