투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울교통공사사장
(경유)	궤도2사업소
제목	고덕차량기지내 궤도공사 작업계획(시험선) 송부

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부에서 추진 중인『하남선(5호선 연장) 궤도공사』의 고덕차량기지내 궤도부설(시험선) 작업계획을 아래와 같이 송부하오니 사업이 원활히 추진될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)

2) 공사기간 : 2018.11.04. ~ 2019.11.04.

3) 도 급 자 : 화성궤도(주)

4) 계약금액 : 4,585,827천원

나. 업무협조 사항

1) 고덕차량기지내 작업차량 및 작업자 출입

2) 선로차단

- 2019.06.08.~06.10.(09:00~18:00) : 분기기 부설

- 2019.06.15.~06.17.(09:00~18:00) : 분기기 철거 및 시험선 이설

3) 시스템(신호, 전차선)분야 인터페이스

4) 고덕차량기지내 작업장(자재적치 등) 제공

5) 세부시공계획(세부일정, 시공방법, 등) 유선 협의

다. 기타사항

1) 공사관리관 : 서울특별시 도시기반시설본부 도시철도토목부

****************************

2) 건설사업관리(감독권한대행 등) : ㈜신승엔지니어링 *****************

3) 현장대리인 : 화성궤도(주) *****************

붙임 : 고덕차량기지 시험선 시공계획 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최경호		궤도과장	최진규		도시철도토목부장	05/22 代윤방식
협조자	주무관	김근수
시행	도시철도토목부-5329	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스 9층	/
전화	772-7242	/전송	772-7306	/	ckh4815@seoul.go.kr	/	부분공개(6)