문서번호	조경과-7550
결재일자	2019.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장
김현이	석승우	05/22 代김호석

2019년 노후 마을마당 보수·정비사업 관련

예산 추가 지원 요청에 따른 검토보고(마포구)

2019. 5

푸른도시국

(조 경 과)

2019년 노후 마을마당 보수·정비사업 관련

예산 추가 지원 요청에 따른 검토보고(마포구)

2019년 노후 마을마당 보수·정비사업 관련 마포구에서 추진중인 이대역 5번출구 상부 마을마당 보수정비에 필요한 구조안전진단용역비 추가 지원 요청이 있어 검토하고 아래와 같이 보고 드림.

- 마포구 공원녹지과-9260(2019.5.21.)호와 관련임 -

1		사업개요

◯ 대 상 지 : 종로구 창삼쉼터 등 20개소

◯ 사업규모 : 12,820㎡

◯ 사업기간 : 2019. 1. ~ 9.

◯ 사업내용 : 수목 보식 및 노후 시설물 정비 등

◯ 총사업비 : 1,067백만원

2		추진경위

◯ 2019.1.10. : 2019년 사업 추진계획 수립

◯ 2019.1.11. : 추진계획 시달(조경과 → 종로구 등 14개 자치구)

◯ 2019.5.21. : 예산 추가 지원 요청(마포구 → 조경과)

3		검토결과

◯ 요청내용 : 구조안전진단에 필요한 예산 추가 지원 요청

(단위: 천원)

대상지	예산 및 집행내역			추 가 요청액	사 유	검토 결과
	예산액	기재배정액	재배정잔액
이대역 상부	200,000	197,238	2,762	6,357	서울교통공사와 협의 결과에 따른 구조안전진단 용역비 추가 지원 요청	적정

◯ 검토결과 : 상기 대상지가 지하철 2호선 이대역 기능실 상부임을 감안하여 구조안전검토를 위한 구조안전진단용역의 필요성이 인정됨에 따라 관련 예산 추가지원 적정

4		조치계획

◯ ‘19 노후 마을마당 보수·정비사업 예산 유보금(78백만원)을 활용 추가 지원

(단위: 천원)

예 산 액	집행액 (기배정액)	집행잔액	추가 지원액	비 고
1,066,910	694,070	372,840	6,357	유보금 78백만원 포함

◯ 예산과목 : 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 노후 마을마당 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

◯ 상기 검토결과와 같이 구조안전진단용역의 필요성이 인정되어 예산을 지원하되, 서울시 기술용역타당성 심의를 득한후 그 결과에 따라 용역비를 재배정코자 함.

붙임  1. 예산 추가 지원 요청 공문 1부.

2. 용역비 산출기초 및 관련 협의공문 일체 각 1부.  끝.