투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약금액변경 및 준공기한 연기 의뢰(서울시근로자 복지관 증축 기계공사)

우리 본부에서 시행중인 「서울시근로자복지관 증축 기계설비공사」 관련, 아래와 같이 계약금액변경 및 준공기한 연장 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 서울시근로자복지관 증축 기계설비공사

2. 계 약 자 : (주)태성(대표자 박차출) 외 1개사

3. 공사기간 : 2018.09.28. ~ 2019.05.27.

4. 계약변경내용

가.계약금액 및 공사기간                                    (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
계약 금액	기계 (소방포함)	168,853,262	183,095,800	(증)14,242,538
공사 기간	기계 (소방포함)	‘18.09.28~’19.05.27.	‘18.09.28.~’19.06.21.	(증) 25일

나. 변경 사유

-선행공정(건축) 준공연장에 따른  후속 공정인 기계분야 공사기간 연기

-현장 여건 및  원활한 시설관리를 위한 추가사항 반영

5. 예산과목: 노동정책담당관,노동존중문화정착,근로자복지증진,서울시복지관운영,시설비

붙  임  1. 방침서 1부

2. 합의서 1부

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경 및 공사기간 연기 요청 검토 보고서(감리단). 끝.

	설비부장
주무관	윤대영		시책사업과장	임병국		설비부장	05/22 代여인웅
협조자
시행	설비부-7481	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8651	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(6)