문서번호	재생정책과-6284
결재일자	2019.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		재생소통팀장	재생정책과장
박일현		김희영	05/22 代김현중
협조

「3.1독립선언광장 조성사업 전기공사 설계 용역」

용역계약 변경계획

2019. 5.

도시재생실

(재생정책과)

「3.1독립선언광장 조성사업 전기공사 설계 용역」

용역계약 변경계획

3.1독립선언광장 조성사업 전기공사 설계 용역과 관련하여, 용역기간 연장을 위한 변경계약을 추진하고자 함

□ 계약현황

○ 용 역 명 : 3.1독립선언광장 조성사업 전기공사 설계 용역

○ 용역기간 : 2019. 3. 29. ~ 2019. 5. 27.

○ 계약금액 : 12,410,000원

○ 계약업체 : 한매전기기술사사무소(대표 김범수)

□ 변경사유 및 내용

○ 계약 변경사유

- 종로구의 설계변경 요구, 공사중 태화관 지하주차장 이용차량 동선 및 주차관제 계획의 결정 지연에 따른 계약기간 연장

○ 계약 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	’19.3.29.~’19.5.27.	’19.3.29.~’19.6.26.	증)30일
계약금액	12,410,000원	변경없음

※ 용역기간 연장 귀책사유 : 서울시 / 지체상금 미부과

□ 향후일정

○ 변경계약 의뢰 및 용역 준공

붙임  합의각서 1부.