함께해요! 2019 을지태극연습!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 아이돌봄포털 구축 용역 주간보고(4주차)

1. 서울시 아이돌봄포털 구축 용역관련 주간 추진실적을 아래와 같이 보고 드립니다.

가. 사업개요

1). 사업기간 : 2019.4.23. ~ 12.18.(8개월, 총 34주)

2). 수행업체 : ㈜제스아이앤씨

3)*******************

나. 추진실적(3주차)                        ※ 주간 회의일정 : 매주 화요일 15시

구분	주간실적(2019. 5.13 ~ 5.17)				차주계획(2019. 5.20 ~ 5.24)
단계 진척	계획	7.0 %	실적	6.0 %	10.0 %
업무 내역	[분석단계] 1. 요구사항 분석 1) 요구사항 기술문서 컨펌 완료 - 요구사항 정의서, 요구사항 추척 매트릭스 2) 사용자 인터뷰 준비 - 인터뷰 질문지 작성 완료 - 인터뷰 대상 검토 2. 프로세스 분석 및 기능/기술 분석 1) 출결관리 기능 분석 - 출결관리 전문 업체 총 11개사 컨텍(70%) - 기능구현 관련 미팅(3개사) 2) 보육포털 업무 회의 (5.14, 첨부) - 참석: 보육포털 담당팀장, 주무관, 용역사 - 내용: 인프라 활용 및 연계방안 검토 3) 보육반장 업무 회의 (5.16, 첨부) - 참석: 보육반장 담당, 시 육아종합지원센터 - 내용: 업무 분석 및 요구사항 상세(회의록) 4) 인프라 구축을 위한 기초자료 준비 - DB 사용량, 데이터 사용량 예측 등 HW 규모 산정				[분석단계] 1. 요구사항 분석 1) 요구사항 기술문서 시스템 등록 2) 사용자 인터뷰 준비 - 인터뷰 대상 결정 및 질문지 명세화 3) 관리자 회원 구성 - 관리자 및 사용자 회원 등급 및 권한 설계 2. 프로세스 분석 및 기능/기술 분석 1) 출결관리 기능 분석 - 출결관리 전문 업체 총 11개사 컨텍(100%) - 기능구현 관련 미팅 예정(3개사) - 출결관리 기능 구현방식 정리 (구현형태/ 프로세스/ 비용/장단점 비교 등) 2) SMS 기능 규모산정 - ‘19년 98개소 기준 SMS 발송비용 산출 3) 개발PC 및 개발서버 구현 방식 정리
	[설계단계] 1. 아키텍처 설계 1) 정보 구조도 (IA) - 정보구조도 협업 리뷰 (5.14)				[설계단계] 1. 아키텍처 설계 1) 정보 구조도 (IA) 고도화 2) 시스템 구성도
	[사업관리] 1. 선금 신청 (나라장터, 5.15)				[사업관리] 1. SW사업저장소 사업정보 등록 - 착수단계 자료 및 정보 등록 완료
기 타	출결관리 기능 구현 방식 결정을 위한 전문업체 미팅 등 사전 충분한 검토과정 필요 - 검토방안 : 다수 전문업체 참여 / 특정 전문업체가 개발 / 본 사업자가 개발 - 고려사항 : 연계 비용 및 보안이슈, 개발 비용, SMS 구현 방법 및 비용, 유지관리 방법 등

붙임   1. 주간업무 보고서(4주차) 1부.

2. 회의록(주간회의, 보육포털회의, 보육반장회의) 각 1부.  끝.

주무관	박지선		아이돌봄사업팀장	최미선		아이돌봄담당관	05/22 김인숙
협조자
시행	아이돌봄담당관-6524	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-4817	/전송	02-2133-0733	/	happy_pjs@seoul.go.kr	/	부분공개(5)