투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결요청(2019년 의정부터 4차 발굴조사 현장인부 공급용역)

조사연구과-706(2019.5.16.)호와 관련하여 『2019년 의정부터 4차 발굴조사 현장인부 공급용역』을 아래와 같이 계약을 변경하고자 합니다.

1. 용  역  명 : 2019년 의정부터 4차 발굴조사 현장인부 공급용역

2. 용역 내용 :  특수인부 40품, 보통인부 200품

3. 계약 대상 : 주식회사 산야(대표 : 이우승)

4. 변경 내용

구분	변경 전	변경 후	비고
계약금액	43,722,800원	74,328,760원	30,605,960원 증액
특수인부	40품	68품	28품 증가
보통인부	200품	340품	140품 증가
계약기간	2019년 6월 30일	2019년 9월 30일	3개월 연장

5. 변경 사유 :  2019년 의정부터 4차 발굴조사를 위해 현장인부 공급용역 계약을 체결하였으나, 예상보다 작업난이도 및 토사발생량이 대폭 증가하여 물량 및 금액, 준공기한을 변경하여 계약을 하고자 함.

6. 예산 과목 : 도시재생실 광화문광장추진단, 광화문일대 역사성장소성 회복, 광화문일대 활성화, 광화문일대 문화재 발굴조사사업, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 과업지시서(변경) 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 변경내역서 1부

5. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

주무관	조치욱		조사연구과장	05/22 박상빈
협조자	주무관	김영수		총무과장	김춘섭
시행	조사연구과-731	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 (신문로2가) 서울역사박물관 조사연구과	/	www.museum.seoul.kr
전화	02)724-0141	/전송	02)724-0206	/	201007312@seoul.go.kr	/	대시민공개