문서번호	기반시설과-1451
결재일자	2019.5.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
박지수		라철흠	05/23 代손창열
협조
	전문관		석대창

『2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

작업지시(2차) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

한강사업본부

(시설부)

『2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

작업지시(2차) 검토보고

한강공원 진․출입시설 안전점검 지적사항 및 민원사항 등을 처리를 위한 「2019년 한강공원 진․출입시설 유지보수 공사(연간단가)」 제2차 작업지시 건에 대하여 검토 보고 드림

1		관련근거

○ 작업지시 우선순위 검토보고(기반시설과-1277호, 2019.05.08)

○ 물빛광장 미끄럼놀이 방지턱 설치 보고(기반시설과-1353호, 2019.05.15)

2		공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2019. 4. 1. ~ 2019. 11. 30.

○ 계약금액 : 304,068천원

○ 계약상대자 : ㈜민정건설 대표 백승언

○ 공사규모

- 진·출입시설 보수 : 데크보수 620㎡, 조류방지망 설치 200㎡, 철재면 재도장 150㎡, 오일스텐재도장 440㎡ 등

- 천사의계단 보수 : 석재판 철거 후 재설치 138㎡, 도막식 방수 138㎡

3		작업지시 개요

○ 소요예산 : 54,329천원

○ 작업위치 : 여의도 물빛광장

○ 작업기간 : 2019. 05. 24. ~ 2019. 05.31.

○ 작업내역

시설명	공 종	규격	수량	작업방법		작업조건
				인력	기계	주간	야간
여의도 물빛광장	석재판 정비	바닥, 재사용	14.5㎡	◌		◌
	석재판 붙임 (교체)	바닥, 습식 (포천석,T=50mm)	24.2㎡	◌		◌
		바닥, 습식 (마천석,T=50mm)	109.3㎡	◌		◌
	석재판 붙임 (신설)	바닥, 습식 (포천석,T=50mm)	13.5㎡	◌		◌
	데크정비	바닥, 합성목재	20.2㎡	◌		◌

4		조치계획

○ 상기 작업지시 사항을 「2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)」 계약상대자에게 작업지시 하고자 하며,

○ 신규공종 및 계약 초과 물량에 대하여 협의 단가를(협의율 93.372%) 적용하여 정산 설계변경 하고자 함.

붙임 : 1. 관련 보고서 각 1부.

2. 작업계획서 및 단가 협의 요청 공문 1부.

3. 개략 공사비 내역(작업지시 2차) 1부.

4. 작업지시서(2차) 1부.  끝.