문서번호	급수운영과-11460
결재일자	2019.5.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최선보	문병희	전결 05/23 김정수
협 조
	시설관리팀장		김남구
	★주무관		한규수

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

노후 배급수관 연차별(2020~2022년) 정비계획

2019. 5.

강서수도사업소

노후 배급수관 연차별(2020~2022년) 정비계획

노후 배급수관 정비공사 완료시기(2022년)가 도래됨에 따라 정비기간 내 완료할 수 있도록 연차별 정비계획을 보고 드림

Ⅰ		현 황

□ 관련근거

○ 노후 배급수관 정비사업 관련 협조요청(누수방지과-4869호, 2019. 5. 2.)

□ 노후 배급수관 현황

○ 노후 배급수관 내역 및 연차별 정비 계획

2019. 1.1. 기준

구분	계	제외 구간	2019년 정비	2020년 정비	2020년 이후 정비	비고
연장 (㎞)	11.8	0.8	6.8 (진행중)	3.6	0.6 (도로굴착 통제구간)	붙임1참조

※ 제외구간은 재개발·재건축구역내 노후관(0.6km) 및 10m미만 연결관로(퇴수관 등 0.2km)임.       ○ 정비 장애구간(도로굴착 통제 및 사유지) 현황

구분	계	도로굴착 통제 해제 구간			사유지	비고
		소계	2021년	2022년
연장(㎞)	0.6	0.6	0.6	-	-

Ⅱ		정비 추진계획

□ 중점 추진사항

❍  금년 정비목표(6.8km)를 겨울철 이전에 달성할 수 있도록 적극 추진

❍  제외구간 중 10m 미만 연결 관로는 현장 조사 후 즉시 정비

- 특히 GIS오류 사항 등을 확인하여 속성 정비 철저 시행

❍  정비 장애구간은 별도 관리하여 기간내 정비 철저

-  도로굴착 통제 구간은 해제 이후 즉시 정비(2022년 내 완료)

- 사유지로 보고된 오류2동 156-195번지는 국유지로 ’19년 하반기 정비예정

붙임  1. 노후관 현황 및 연차별 정비계획서(총괄) 1부.

2. 사업소 노후관 현황 및 연차별 정비계획(세부내역) 1부.  끝.