함께해요! 2019 을지태극연습!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약 의뢰

1. 재생정책과-6284(2019.5.22.)와 관련입니다.

2.「3.1독립선언광장 조성사업 전기공사 설계 용역」에 대하여 다음과 같이 계약변경하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 3.1독립선언광장 조성사업 전기공사 설계 용역

나. 계약금액 : 금12,410,000원(금일천이백사십일만원정)

다. 계약기간 : 2019. 3. 39. ~ 2019. 5. 27.

라. 계약업체 : 한매전기기술사사무소(대표 김범수)

마. 변경내용

변경내용	당초	변경후	비고
계약금액	금12,410,000원	변경없음
계약기간	’19. 3. 29. ~ ’19. 5. 27.	’19. 3. 29. ~ ’19. 6. 26.	증)30일

붙임  1. 용역계약 변경계획 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	재생정책과장
실무사무관	박일현		재생소통팀장	김희영		재생정책과장	05/23 백운석
협조자
시행	재생정책과-6298	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1861	/전송	02-2133-1304	/	69ihpark@seoul.go.kr	/	부분공개(5)