투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(설계변경 승인 회신-월드컵대교 건설 전기공사)

1. 업무지시현장 : 월드컵대교 건설 전기공사(장기-1차) 주식회사 포스코건설

2. 작 성 일 자 : 2019-05-24 13:05:47

3. 지 시 내 용

가. 문서번호 ㈜포스코건설동 D*******000544호(2019.5.23.)와 관련입니다.

나. “월드컵대교 건설 전기공사(2차)” 와 관련하여 설계변경 내용이 적정한 것으로         판단되어 승인하고 회신하오니 변경계약 및 공사시행(준공) 등 감리업무 수행에         만전을 기하여 주시기 바랍니다.

다. 설계변경 승인내용

구 분	당 초	변 경	증 감 액
총 차	5,374,013,900원	5,326,790,000원	감)47,223,900원
2 차	377,000,000원	377,000,000원	-

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							호정오			건축설비과장					전결 05/24 김은덕
협조자
시행			설비부-7582									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8628						/전송			02-3708-8659					/													/	대시민공개