문서번호	시설보수과-2982
결재일자	2019.5.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김민호		代안종필	05/24 이성재
협조
	주무관		이석근

『소화조 및 저류조 퇴적물 처리용역』 실정 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.05.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『소화조 및 저류조 퇴적물 처리용역』 실정 보고

우리 센터에서 시행중인 『소화조 및 저류조 퇴적물 처리용역 』과 관련 퇴적물 처리 추가 사항이 발생되어 아래와 같이 보고함

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 소화조 및 저류조 퇴적물 처리 용역

○ 용역내용 : 퇴적물 제거 9,394㎥(소화조 3조 9,000㎥, 저류조 8조 394㎥)

○ 용역기간 : 2019. 04. 01. ~ 2019. 12. 31.

○ 도 급 자 : 진명환경산업(주)  대표 정옥채

○ 도 급 액 : 383,944천원

Ⅱ		보고내용

○ 제2처리장 소화조 10조 퇴적물 제거 요청 : 운영과-3273(2019.05.01.)

- 제2처리장 소화조 10조 퇴적물층이 두꺼워 소화조 기능 상실에 따른 퇴적물 처리 요청(예상물량 1,800㎥)

○ 제3처리장 소화조 주변 배수로 퇴적물 제거 요청 : 운영과-3765(2019.05.22.)

- 제3처리장 소화조 운영 중 이상현상으로 퇴적물이 넘처 배수로에 적치되어 있어 처리 요청(예상물량 225㎥)

Ⅳ		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 퇴적물 제거가 필요함에 따라 도급자로 하여금 우선 시행하고 추후 설계변경에 반영 정산 처리코자 함.

붙임 : 관련공문 각 1부.  끝.