투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(LED조명등) 납품기한 연기 요청

1. 우리 본부에서 시행하고 있는 『서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사』에 소요되는  관급자재(LED조명등)에 대해 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 변경내용

대 상	납품요구번호 (계약번호)	계약금액(원)	납품기한		계약상대자	비 고
			당 초	변 경
******	121815801000 *************	2,247,000	**********	**********	****
******	121815800800 (1262072820)	50,894,000	**********	**********
******	121815800900 (23163086909)	11,695,000	**********	**********	성안조명(주)

나. 연기사유 : 별관동 평면 변경에 따른 설치시기 미도래

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 실정보고문 1부.

2. 합의각서 및 계약서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	곽진곤		시책사업과장	임병국		설비부장	05/27 임정규
협조자
시행	설비부-7719	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)