문서번호	설비부-7751
결재일자	2019.5.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	임병국	05/27 임정규

『서울시 근로자복지관 증축 통신공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2019. 5.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울시 근로자복지관 증축 통신공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

『서울시 근로자복지관 증축 통신공사』관급자재와 관련 현장 납품시기가 미도래하여 납품기한 연기하고자 보고 드림

관련근거

❍ 관급자재 납품기한 연기 요청 [㈜케빅 외 6개사]

공사개요

❍ 사 업 명 : 서울시 근로자복지관 증축 통신공사

❍ 공사위치 : 영등포구 국회대로44길 10

❍ 공사규모 : 지하1층/지상5층(지상5층 리모델링 및 1개층 수직증축)

❍ 주요설비 : 방송설비공사, AV설비공사, TV 및 LAN 설비공사

❍ 공사기간 : 2018.10.29.~2019.06.28.

❍ 공 사 비 : 120백만원(도급비 81백만원, 관급비 39백만원)

❍ 위탁감독 : 서울시설공단

❍ 시 공 사 : ㈜헤로스테크

검토내용

❍ 납품기한 연기 사유

- 선행 공종(건축) 준공기한 연장에 따른 설비공사 관급자재 납품 시기 미도래

❍ 납품기한 연기 내용

건 명	납품요구변호	계약자	계약금액(원)	납품기한		비고
				당초	변경
AV설비	121824945100	㈜에이치엔엠	7,739,500	2019.05.31.	2019.06.30.	계약 금액 변경 없음
	121818292200	㈜케빅	22,829,810	2019.05.31.	2019.06.30.
	121818288600	㈜코아스	176,190	2019.05.31.	2019.06.30.
	121824944900	㈜카스피	1,000,600	2019.05.31.	2019.06.30.
AV설비	121824944800	㈜루먼텍	1,957,510	2019.05.31.	2019.06.30.	계약 금액 변경 없음
	121882407100	㈜삼보	211,130	2019.05.31.	2019.06.30.
	121824944700	㈜카스피	2,029,350	2019.05.31.	2019.06.30.
	121824944600	효성ITX㈜	2,986,030	2019.05.31.	2019.06.30.
계			38,930,120

❍ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

조치계획

❍ 관급자재 설치 시기 미도래로 실제 납품 및 설치 가능한 시점(‘19.06.30.)으로 연기 조치하여 공정관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 관급자재 납품기한 연장 관련 문서 1부.  끝.