문서번호	설비부-7773
결재일자	2019.5.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	05/27 임정규
협조

『남산예장자락 재생 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2019. 05.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

『남산예장자락 재생사업 전기공사』에 소요되는 관급자재(LED실내조명기구)에 대하여 선행공정 지연에 따라 납품기한 연기하고자 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

□  규    모 : 상부 공원(16,373m2), 지하 주차장(16,992m2)

□  공사기간 : `17.08.01~`19.12.31(주공종 연기예정)

□  공사금액 : 2,669백만원(도급 1,568, 관급1,098, 이전비3)

□  감 리 사 : ㈜동성엔지니어링

□  시 공 사 : ㈜한전산업개발

□  공정율(전기) : 18%(부지 외부 가로등공사 진행)

2		관련근거

□  남산예장감리 제19-190호(`19.5.21) : 건설사업관리기술단 관급        자재 납품기한 연기 보고

3		납품기한 연기내용

□  계약현황 및 연기내용

품 명	계약금액	계 약 자	납품기한
			당 초	변 경
LED실내조명등	************	****	`19.06.12	`19.12.31
LED실내조명등	***********	*	〃	〃
LED실내조명등	**********	*	〃	〃

□  연기사유 : 선행공정(건축) 지연에 따라 실내조명기구 설치 시기 미도래

□  귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

4		보고자 의견

□ 「남산예장자락 재생사업」은 현재 부지 외부 도로조성 및 내부 터파기 진행중이며 실질적인 건축공사 진행은 없는 상황으로,

□ 현 시점에서 LED실내조명기구를 반입·설치할 여건이 안되므로 계약부서에 납품기한 연기 의뢰하고자 함.

붙 임 : 감리단 공문 1부. 끝.