문서번호	토목부-9263
결재일자	2019.5.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
백종임		명경출	05/27 代이동훈
협조
	주무관		서민석

설계변경 검토보고(제3회)

[구로고가 철거공사]

2019. 05.

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계변경 검토보고(제3회)

【구로고가 철거공사】

「구로고가 철거공사」중 발생한 물가변동 계약금액 조정(E/S), 교통관리원 배치 및 정산, 연약지반 치환 등 현장 실정보고 승인사항 등을 반영한 설계변경(제3회)에 관한 검토 보고임.

〔관련근거〕

◦ 구로고가 철거공사 설계변경(3회) 요청(동부엔지니어링1030호,‘19.5.21)

◦ 구로고가차도 철거사업 관련 예산집행계획 변경알림(도로계획과-7350,‘19.5.21)

□ 공사개요

◦ 공 사 명 : 구로고가 철거공사

◦ 위    치 : 구로구 가리봉동 140(남부순환로, 디지털단지오거리 주변)

◦ 규    모 : 고가차도 철거 폭18.5m, 연장536m

(보도확장 폭3M, 연장 1km 포함)

◦ 공사기간 : '18. 8. 20. ~ '19. 7. 30.

◦ 총공사비 : 9,171백만원(도급비 7,783 관급비 1,268 기타 120)

◦ 시 공 사 : ㈜새천년종합건설

◦ 감 리 단 : 동부엔지니어링㈜ 외 2

□ 건설사업관리단 보고내용

가. 실정보고 승인 현황

(단위: 천원)

연 번	설 계 변 경 반 영	증 · 감	승 인 현 황
1	물가변동(공사)으로인한 계약금액의 조정 - 당초 실정보고 금액 : 288,700,000 - 변경 설계변경 수량적용 금액 : 262,974,000 - 제외수량제외, 신규공정제외, PS금액 제외 감 25,726,000	262,974	도시기반시설본부-19-4511 (2019.04.24)
2	교통관리원 배치 및 정산 (공사중 소통대책 및 구로/금천경찰서협의/요구사항반영) ① 내역서(제잡비 : 경비) - 교통통제수(주간) 580인 변경없음 - 교통통제수(야간) 감 134인 ② 제경비제외공정(경찰서 교통신호수 요구반영) - 교통신호수(주간) 증 1,272인	182,724	도시기반시설본부-19-5208 (2019.05.10)

연 번	설 계 변 경 반 영	증 · 감	승 인 현 황
3	옹벽절단중 설계와 상이한 수량 반영 (현지여건을 반영한 천공 및 절단수량 변경 반영) ① 역T형옹벽⇨역T형옹벽+중력식옹벽 증220m - E.D.C.S 절단(주간) 증30㎡ - E.D.C.S 절단(야간) 증30㎡ - 코아천공 절단용φ50 증5m - 코아천공 인양용φ75(환봉) 증15m	55,175	도시기반시설본부-19-5309 (2019.05.14)
4	고가차도부 천공 및 절단수량 조정 (현지여건을 반영한 천공 및 절단수량 변경 반영) -빔과 빔사이 속채움부 E.D.C.S절단 증19.4㎡ -거더인양 미끄럼방지 천공홀 반영 증45m -빔으로인한 휠쏘절단 불가 E.D.C.S수평절단 증7.2㎡	31,980	도시기반시설본부-19-5239 (2019.05.13)
5	포장공사 교차로 수량 정정 및 야간할증 반영 (공기단축 및 교통소통원활을 위해 야간공사 시행) - 기층포설 및 다짐(T=17cm, 주간) 감 7,167㎡ - 기층포설 및 다짐(T=17cm, 야간) 증 6,717㎡ - 중간층포설 및 다짐(T=13cm, 주간) 감 7,167㎡ - 중간층포설 및 다짐(T=13cm, 야간) 증 6,717㎡	-6,600	도시기반시설본부-19-5649 (2019.05.22)
6	시점부 연약지반 치환 반영 (연약지반 개량으로 향후 균열 및 침하 저감) - 토사깍기 증 771㎥ - 연약지반 개량(T=50cm, 골재) 증 634㎥ - 연약지반 개량(T=50cm, 발파암, 자재무대) 증 137㎥ (서부간선지하차도 1공구)	39,600	도시기반시설본부-19-5668 (2019.05.22)
계	도급비	565,853

나. 공종별 증․감 현황

(단위: 백만원)

공 종	당 초		변 경		증 ․ 감
	내용	금액	내용	금액
1.토 공	철콘파쇄(압쇄기): 1,987m3 아스팔트깨기:1,322m3 코아천공(절Ø50): 217m 코아천공(인Ø75): 240m 코아천공(인Ø150): 204m 토사깍기:36,328m3 사토운반(40.1km): 32,545m3	1,808	철콘파쇄(압쇄기): 2,073m3 아스팔트깨기:1,142m3 코아천공(절Ø50): 223m 코아천공(인Ø75): 255m 코아천공(인Ø150): 249m 토사깍기:37,028m3 사토운반(40.1km): 33,246m3	1,835	27
2.고가차도철거공	EDCS 절단(주간) : 981m2 EDCS 절단(야간) : 698m2 휠쏘절단 : 2,967m 절단부재 인양 : 1,426m3	1,755	EDCS 절단(주간) : 1,034m2 EDCS 절단(야간) : 729m2 휠쏘절단 : 2,931m 절단부재 인양 : 1,511m3	1,793	38
3.포 장 공	보조기층포설: 7,019m3 연약지반 개량(골치) : 0m3 연약지반 개량(파치) : 0m3 기층포설(주):14,038m2 기층포설(야): 0 m2 중간층포설(주):14,038m2 중간층포설(야): 0 m2	647	보조기층포설: 6,794m3 연약지반 개량(골치) : 634m3 연약지반 개량(파치) : 137m3 기층포설(주) : 6,871m2 기층포설(야) : 6,717m2 중간층포설(주) : 6,871m2 중간층포설(야) : 6,717m2	658	11
4.교통안전시설공	1식	63	1식	63	0
5.부 대 공	교통통제수(주간) : 558인 교통통제수(야간) : 225인	440	교통통제수(주간) : 558인 교통통제수(야간) : 91인	418	-22

다. 공사비 증·감 현황

(단위: 천원)

공 종	전체 (3회 변경)			비 고
	당 초	변 경	증․ 감
총공사비(A+B+C)	8,607,331	9,171,100	563,769
A.도급공사비	7,217,400	7,783,253	565,853
가.직접공사비	4,713,538	4,767,651	54,113
1)토 공	1,808,328	1,835,110	26,782
2)고가차도철거공	1,754,819	1,793,199	38,380
3)포 장 공	646,668	658,371	11,703
4)교통안전시설공	63,381	63,381	-
5)부 대 공	440,342	417,590	-22,752
나.간접노무비	233,400	238,570	5,170
다.경 비	636,117	648,870	12,753
라.일반관리비	306,510	310,464	3,954
마.이윤	544,771	550,781	6,010
바.제경비제외공정	126,937	320,281	193,344
사.물가변동(K=4.52%)	-	239,068	239,068
아.공급가액(가~바의 합)	6,561,273	7,075,685	514,412
자.부가가치세	656,127	707,568	51,441
B.관급자재대	1,270,310	1,268,226	-2,084
C.이설공사비	119,621	119,621	-

□ 조치계획

◦ 상기 건설사업관리단의 설계변경(제3회) 요청건은 공사 중 물가변동 계약금액 조정(E/S), 교통관리원 배치 및 정산, 옹벽절단 및 고가차도부 천공/절단 수량 조정, 연약지반 치환 등 기 실정보고 승인사항을 반영한 설계변경사항으로 타당하며,

◦ 증가되는 공사비는 도로계획과 예산집행계획 변경으로 확보된 예산(1,500백만원)을 사용하여 설계변경을 시행하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 설계변경 요청문(검토의견서 포함) 1부.  끝.