	서울특별시도시기반시설본부
수신자	방재시설부장
(경유)
제 목	변경계약 체결통보[서초역~방배로간 도로개설공사]

1. 방재시설부-7480(2019.5.27)의 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 [서초역~방배로간 도로개설공사] 계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 변경계약 체결현황

(단위:원)

구 분	당 초		변 경
	총 차	5차	총 차	5차
계 약 자	롯데건설㈜		변경없음
계약금액	47,890,000,000	19,779,193,300	49,948,000,000	21,837,193,300
준공기한	2019.05.31	2019.05.31	2019.06.30	2019.06.30

붙임  변경계약서 1부.  끝.

	총무부장
주무관	김용범		재무예산과장	홍수열		총무부장	05/27 정진일
협조자
시행	총무부-10220	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 11층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-2374	/전송	02-3708-2365	/	kim389@seoul.go.kr	/	부분공개(6)