	서울시립과학관
수신자	총무과장
(경유)
제 목	「서울시립과학관 천체관측실 구축 설계용역」 계약변경(기간연장 및 금액조정) 의뢰

1. 「계약체결 통보[서울시립과학관 천체관측실 구축 설계용역]」(총무과-4001, 2019.5.7.)호 및 「서울시립과학관 천체관측실 구축 설계 중간보고 사항 검토보고」(전시과-3848, 2019.5.22.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여, 현재 시행 중인 「서울시립과학관 천체관측실 구축 설계용역」 계약 건에 대하여 아래와 같이 계약기간을 연장하는 계약변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

◇  아    래  ◇

가. 계 약 명 : 서울시립과학관 천체관측실 구축 설계용역

나. 계 약 자 : 소이건축사사무소 (대표자 : 이정원)

다. 변경사유 : 붙임 문서 참조(붙임 1, 3)

라. 계약변경 내용 : 계약기간(용역기간) 연장 및 계약금액 변경

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계약금액	13,800,000원	15,200,000원	증 1,400,000
용역기간	`19.5.7.～`19.6.5.	`19.5.7.～`19.7.25.	증 50일

<※  상세내용 붙임 1. 참조>

붙임 1. (방침서)서울시립과학관 천체관측실 구축 설계 실정보고 사항 검토보고 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공(납품)기한 연기 의뢰서 1부.

4. 실정보고서 1부.  끝.

	서울시립과학관장
주무관	신지혜		전시과장	이현배		서울시립과학관장	05/27 이정모
협조자	주무관	오태숙		★총무과장	김호식
시행	전시과-3964	(		)	접수		(		)
우	01792	서울특별시 노원구 한글비석로 160 서울시립과학관 (하계동)	/
전화	02-970-4542	/전송	02-970-4597	/		/	부분공개(5)