문서번호	토목부-9338
결재일자	2019.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도시고속도로과장	토목부장
서민석		명경출	전결 05/28 김영수
협조
	주무관		박운용

설계내역서 수량 불일치 정정 검토보고

- 강남순환도시고속도로(4공구) -

2019. 5.

도시기반시설본부

토 목 부

-강남순환도시고속도로(4공구)-

설계내역서 수량 불일치 정정 검토보고

당 현장의 PC개거 및 콘크리트 타설 수량이 설계내역서와 불일치하여 이를 정정코자 검토보고 드림.

공사개요

❍  위    치 : 금천구 독산동～ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

❍  규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍  도 급 비 : 1,984억 원

❍  공사기간 : □01. 12. 29. ～□19. 11.30.(민자구간 개통 □16. 7.3.)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜/㈜서영엔지니어링

건설사업관리단 검토의견

❍ 배수공중 PC개거의 연장이 설계내역서에 과다 계상됨.

- PC개거 연장 정정 : 165m → 109m

❍ 금하지하차도 콘크리트 타설 수량이 설계내역서에 과소 계상됨.

- 콘크리트 타설 수량 정정 : 12,250㎥ → 17,250㎥

❍ 설계내역서상 오기입된 PC개거의 연장 및 콘크리트 타설 수량을 정정하고, 변경 산정한 공사비에 대해서는 설계 변경시 반영 하고자 함.

❍ 수량 증 · 감 현황

공 종	단위	당 초	변 경	증․감	비 고
① PC개거	m	165	109	-56	도시계획도로
② 콘크리트타설/펌프카(0~15m기초)	㎥	12,250	17,250	5,000	금하지하차도

❍ 공사비 증 · 감 현황

(단위 : 천원)

비 목	당 초	변 경	증․감	비 고
순공사비	296,154	275,651	-20,503
제 잡 비	82,845	83,848	1,003
총공사비	379,000	359,500	-19,500

검토의견

❍ 설계내역서와 현장 수량이 불일치하는 부분에 대하여 정정코자하는 건설사업관리단의 실정보고는 적정하므로 승인하고 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.