설계변경 심의 의견서

부분공개(5)

□ 공사명: 2018년 서초구 관내 상수도 공사(장기계속단가-3차,최종)

신청 부서명	강남수도사업소 시설관리과
공사 감독원	지방시설주사보 최지영
제출 년월일	2019. 5. 27.

□ 심의 위원회 의견

○ 심의일시: 2019. 5. 27.(월) 15:00~

○ 심의의견: 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이

의견 제시함

○ 심의의견사항 반영: 아래 “의견”란에 검토사항 작성함

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

최춘근

05/28

최춘근

적정

위    원

주무관

박철호

박철호

적정함

위    원

주무관

강희창

강희창

적정함

위    원

주무관

이승우

이승우

적정함

위    원

주무관

김진성

김진성

타당함

위    원

주무관

제영도

제영도

적정함

담    당

주무관

최지영

최지영

설계변경 사유서

□ 공사 현황

○ 공 사 명: 2018년 서초구 관내 상수도공사(장기계속단가-3차,최종)

○ 공사개요: 관부설 D=15~300㎜

당초)L=2,022m  변경)L=1,991m

○ 공사기간: 2018. 5. 2. ~ 2019. 6. 30.

○ 총도급비: 당초)915,991,800원,변경)915,838,000원(감153,800원)

○ 계약상대자: ㈜푸르내건설 대표 박정아

□ 설계변경 사유 및 주요 내용

○ 관련규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법시행령 제74조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정자치부 예규 제67호(2016.10.4.)제13장 공사계약일반조건 제6절 공사설계의 변경 및 제7절 계약금액의조정

○ 공사현장 실정에 따른 변경요인

- 계약물량증가: 아스팔트 포장절단(100~150㎜) 외 122종

- 계약물량감소: 고압블록 포장걷기 면적(10㎡) 외 216종

- 신공정발생: 부단수천공 분기점분기 250㎜×연결관 25~30㎜외 12종

- 사급자재 물량 변경: 스테인레스강관(D=13㎜) 외 122종

□ 설계변경 금액

(단위:원)

구 분	계 약 금 액	변 경 금 액	증·감
도 급 비	915,991,800	915,838,000	감)153,800
공급가액	832,719,819	832,580,000	감)139,819
부가가치세	83,271,981	83,258,000	감)13,981

붙임: 설계변경 내역서 등 각 1부.  끝.