문서번호	급수운영과-9954
결재일자	2019.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	급수운영과장
조승수	代유동훈	05/28 이성환
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수’

착공계 검토 보고

[가산동141-13~독산동152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사]

2019. 05. 28.(화)

남부수도사업소

(급수운영과)

착공계 검토 보고

[가산동141-13~독산동152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사]

「가산동141-13~독산동152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사」와 관련하여 아래와 같이 착공계 접수되어 아래와 같이 검토 후 보고합니다.

※관련근거 : 공사감독2처-5799(2019.05.24.) 『착공신고서 검토보고(가산동 배급수관)』

Ⅰ		공사 개요

◯ 공 사 명 : 가산동141-13~독산동152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사

◯ 공사위치 : 금천구 가산동141-13 외 1개소 일대

◯ 공사개요 : 배급수관 신설(D=300㎜, L=2,270m)

◯ 공사위치

**************************************

◯ 공사기간 : 2019. 5. 23. ~ 2020. 1. 17.

◯ 시공업체 : 석영토건(주)

◯ 건설사업관리단 : 서울시설공단 공사감독2처

◯ 관련문서

- 공사감독2처-5799(2019.05.24.) : 착공신고서 검토 보고(가산동 배급수관)

- 급수운영과-9803(2019.05.27.) : 착공신고서 검토 결과 제출

Ⅱ		검토 내용

◯ 착공계 제출사항 검토

- 계약업체 : 석영토건(주) 대표 서용식

☞ 사업종목: 상하수도설비공사업(*****************)

- 현장대리인 선임계(공사기간: 2019. 5. ~ 2020. 1.)

성명	생년월일	자격종목	검토사항	비고
***	********	토목분야 초급기술자	건설기술자 경력증명서 등	감독의견: 가능

- 품질관리자 선임계(공사기간: 2019. 5. ~ 2020. 1.)

성명	생년월일	자격종목	검토사항	비고
***	********	품질분야 중급기술자	건설기술자 경력증명서 등	감독의견: 가능

◯ 상수도 배급수관공사 참여자 현황

구분		시공참여자			비고
		직급	성명	소속
발주기관		주무관	조승수	상수도사업본부 (남부수도사업소)	02-3146-4546
시설 공단	감 독	**	***	******	*************
시공 업체	현장대리인	**	***	*****	*************
	관리자	**	***	*****	*************
	기능공	***	***	*****	*
	기능공	***	***	*****	*
	기능공	***	***	*****	*
	기능공	****	***	*****	*

Ⅲ		검토 의견

NO	검토항목		검토내용	검토결과
1	현장기술자 지정	현장대리인	○건설산업기본법 시행령 별표5 『공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준』의 공사예정금액30억미만에 해당됨	적정
		품질관리자	○건설기술진흥법 시행규칙 별표5 『건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준』의 초급 품질관리 대상공사에 해당됨	적정
		안전관리자	○의무사항은 아니나, 현장대리인을 안전담당자로 지정함	적정
2	건설예정공정표		○작업간 선행,동시 및 완료 등 공사전,후간의 연간성이 명시되고, 예정공정율이 적정하게 작성됨	적정
3	품질시험계획서		○품질시험계획 수립됨	적정
4	공사도급 계약서사본 및 산출내역서		○공사입찰공고서의 국민건강보험료, 국민연금보험료 등 산출내역서에 조정 없이 반영됨	적정
5	착공 전 사진		○공사예정현황 도로 및 주변 건물 등의 전경이 잘 나타나도록 촬영됨	적정
6	현장기술자 경력확인서		○현장기술자 경력증명서 및 건설기술경력증 제출됨	적정
7	안전관리대책		○안전관리계획 수립 대상건설공사가 아니나, 현장의 안전관리를 위하여 안전관리 대책 수립됨 ○시공계획서 제출시 공단에서 안전관리 대책 세부수립 여부 확인 사항임	적정
8	유해․위험방지 계획서		○해당사항 없음	적정
9	노무동원 및 장비투입계획서		○공사의 규모 및 성격, 특성에 맞게 장비 및 수량이 계획됨	적정
10	관급자재 수급계획서		○예정공정에 따른 관급자재 수급계획 수립됨	적정

붙임  1. 착공신고서 검토결과 1부.

붙임  2. 착공신고서 검토보고 1부.

붙임  3. 착공신고서 제출 1부.

붙임  4. 착공신고서 1부.  끝.