투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기요청(남산 무장애 친화공원 조성사업 실시설계용역)

「남산 무장애 친화공원 조성사업 실시설계용역」준공기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 남산 무장애 친화공원 조성사업 실시설계용역

2. 용역기간 : 2019. 3. 4 ~ 6. 1

3. 도 급 비 : ***********************

4. 도 급 자 : ******************

5. 준공기한

가. 당  초 : 2019. 3. 4. ~ 6. 1

나. 변  경 : 2019. 3. 4. ~ 6. 30

다. 연기사유 : 관련기관 등 자문 등을 통한 추가 정비사항 발생으로 현장조사, 검토 등에 따른 소요기간 부족으로 부득이 준공기한 연기

6. 지체상환금 부과 여부 : 미부과

붙임  1. 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	김소연		조경팀장	한광수		시설과장	05/28 김재균
협조자
시행	시설과-2169	(		)	접수		(		)
우			/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송		/	chau420@seoul.go.kr	/	부분공개(6)