문서번호	기전설비과-1249
결재일자	2019.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이균형		정임근	05/28 전영주
협 조

공사 실정보고 검토보고

(광나루안내센터 리모델링 전기공사)

2019. 05.

한강사업본부

(기전설비과)

공사 실정보고 검토보고

(광나루안내센터 리모델링 전기공사)

우리본부에서 시행중인「광나루안내센터 리모델링 전기공사」와 관련하여 감리업체가 제출한 공사 실정보고서에 대하여 검토보고 드림.

관련근거

극동(광나루) *******1호(`19.5.27) : 실정보고서

공사개요

공 사 명 : 광나루안내센터 리모델링 전기공사

계약금액 : 금95,469,910원

계약업체 : 제이에스통신건설(주) 대표 장현수

공사기간 : 2019. 2. 11 ~ 2019. 8. 9

감리업체 : ㈜극동문화전기설계 대표 정석주

공사 주요내용

- 전력인입, 전력간선, 동력설비, 전등설비, 전열설비, 태양광설비,

유도등 설비공사

보고내용

현장여건에 따른 물량 증감사항 설계변경

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
공급가액	86,790,828	86,128,182	(감) 662,646
부 가 세	8,679,082	8,612,818	(감) 66,264
총 공사비	95,469,910	94,741,000	(감) 728,910

관급자재(태양광 발전설비) 납품기한 변경

- 선행 공정인 전기 배선공사 이후 태양광 발전설비 설치하여야 하나      선행공정 미시공에 따른 공사품질 및 안전성 확보를 위하여 납품기한 연기

ㆍ 당  초 : 2019. 5. 30

ㆍ 변  경 : 2019.  6. 30

보고자 의견

감리사에서 제출한 보고 사항을 검토한 결과, 현장여건에 따른 물량증·감 변경내역에 대여 설계변경 시행 및 관급자재(태양광 발전설비) 납품기한을 연기조치 하고자 함.

향후계획

`19. 5 : 총무과에 공사 설계변경 및 관급자재 계약기간 연기의뢰

`19. 6 : 공사완료

붙임 : 실정보고서 및 내역서 각1부.  끝.