투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(제3회)에 따른 변경계약 의뢰[구로고가 철거공사]

우리 본부에서 시행 중인『구로고가 철거공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제3회) 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 구로고가 철거공사

2. 공사개요 : 고가철거 폭 18.5m, 연장 536m

(보도확장 폭3m, 연장 1km 포함)

3. 공사기간 : 2018. 8. 20.~2019. 7. 31.

4. 도 급 비 : 금7,217,400천원

5. 도 급 자 : 새천년종합건설(주) 외 2개사

6. 설계변경 내용

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증･감	비고
도 급 비	7,217,400	7,783,253	증) 565,853
공사기간	’18. 8. 20. ~ ’19. 7. 31.	’18. 8. 20. ~ ’19. 7. 31.	변경없음

7. 예산과목 : 도시개발특별회계, 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충,

고가차도 철거, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 요청문(감리단) 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	백종임		도시고속도로과장	명경출		토목부장	05/28 김영수
협조자	주무관	서민석
시행	토목부-9289	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	ba100@seoul.go.kr	/	부분공개(5)