문서번호	도시철도설비부-5051
결재일자	2019.5.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		송변전과장	도시철도설비부장
문학준		서태창	05/29 구자훈
협조

도시철도 하남선(5호선연장) 1단계 전차선공사 실정보고 검토 보고

2019. 5.

도시기반시설본부

[도시철도설비부]

도시철도 하남선(5호선연장) 1단계 전차선공사 실정보고 검토 보고

도시철도 하남선(5호선연장) 1단계 전차선공사 시행 중 실정보고에 대하여 검토하고 보고 드림

※ 서지 하남선(감)제19-463호(2019.5.24.)관련임

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 도시철도 하남선(5호선 연장) 1단계 전차선공사

○ 계 약 자 : ㈜건양전기신호 대표 홍순양 외 1개사

○ 계약금액 : 금5,223,536,437원(1차:금4,200,000,000원)

○ 공사기간 : 2018.7.20.~2021.7.19.(2차:2018.7.20~2019.6.30.)

○ 감 리 단 : 세종기술(주) 대표 송진호 외 2개사

Ⅱ		실정보고 내용

■ 실정보고 현황

○ 상일동역 S/P 급전케이블 실제 설치 수량 변경 및 현장여건 변경

구분	****	****	****
수량변경	*******************************	*****************************************************************************************	***************

○ 주요 물량 변경

구 분	공 종	단위	당초	변경	비 고
******	******************	*	*****	*
	******************	*	*	*****
	*************************	*	*	*****
****	*******	**	*****	*
	*******	**	*	*****
**	**	*	*	*

○ 변경금액 현황

구분	건명	금액(천원)
		당초	변경	증감
1	******	431,145	541****	*******
2	******	224****	229****	*****
3	***1식	23****	35****	******
***		*******	*******	*******
*****		*******	*********	*******

Ⅲ		조치계획

○ 감리단의 검토의견에 따라 실정보고 조건부 승인 통보

- 승인조건 : 설계변경은 설계변경자문위원회 결과에 따라 실시하고  준공 전 안전관리비 등 정산하여 감액 조치

Ⅳ		행정사항

○ 설계변경자문위원회 개최

붙임 감리단 실정보고 1부.  끝.