문서번호	설비부-7890
결재일자	2019.5.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
박경철		여인웅	전결 05/29 임정규
협조

‘노들섬 특화공간 조성 기계설비공사’

설계변경(총차, 2차 정산) 검토보고

2019. 05.

도시기반시설본부

설비부

‘노들섬 특화공간 조성 기계설비공사’

설계변경(총차 및 2차정산) 검토보고

우리 본부에서 추진 중인 ‘노들섬 특화공간 조성 기계설비공사’ 관련, 책임건설사업관리기술자로부터 제출된 설계변경 정산관련 검토 사항에 대하여 검토 보고 드림

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 노들섬 특화공간 조성 기계설비공사

❍ 공사규모 : 지상 3층, 연면적 9,385㎡

❍ 공사기간 : 2017.12.08.~2019. 08.31.(총차)

2017.12.08.~2018. 07.31.(1차) ► 준공

2018.05.28.~2019. 05.31.(2차)

2019.02.22.~2019. 08.31.(3차)

❍ 공사금액 : 2,265백만원(1차:40, 2차:1,476, 3차:742)

❍ 시 공 사 : 중원엔지니어링㈜

❍ 책임건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소

2		관련근거

❍ 설계변경(정산) 검토보고: 유탑노들 제19-237(2019.5.28.)호

3		검토보고내용

❍ 설계변경 사유

- 총 차 : 운영부서 요청에 의한 내부 평면 변경사항 반영

- 2  차 : 운영부서 요청에 의한 내부 평면 변경사항  및 준공관련 제경비 정산 반영

❍ 주요 설계변경 현황

< 총 차>

① 주요 설계변경 내용

공 종	변 경 사 유	변 경 내 용	변경 금액(천원)
			변경 전	변경 후	증 감
장비 설치	▪ 운영부서(공공재생과) 요청사항 반영 - 관급 조달품목 제외	▪ 냉난방 실외기 1대 추가	0	5,836,750 (직접비)	5,836,750

② 설계변경 금액                                           (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총 차	2,265,109,320	2,272,609,320	증 7,500,000	․

< 2 차>

① 설계변경(정산) 내용                                      (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증/감	설계변경 사유 및 변경내역
직 접 비	986,163,052	991,999,802	5,836,750	‣ 운영부서 평면변경 요청사항 반영 ·냉난방 실외기 1대 추가
보험료 등 간 접 비	490,316,948	469,560,198	-20,756,750	연금보험료 및 안전관리비 등 정산
합 계	1,476,480,000	1,461,560,000	-14,920,000

❍ 설계변경(정산)금액                                        (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총 차	2,265,109,320	2,272,609,320	증 7,500,000	▻ 공사 기간 변경 없음
2 차	1,476,480,000	1,461,560,000	감 14,920,000

❍ 책임건설관리사업기술자 검토의견

- 주관부서(공공재생과) 요청에 의한 평면변경 사항으로 총차 및 2차 설계         변경(정산)에 대한 내용이 적정하므로, 설계변경 및 준공정산 처리함이 타당함.

4		보고자 의견

❍ 운영부서 요청에 의한 평면변경에 따른 냉난방설비 반영 및 각종 보험료  등을 정산 반영하기 위한 책임건설관리사업기술자의 검토보고 내용이 타당   하다고 판단되므로,

❍ 설계변경 및 각종 보험료 정산 내용을 계약부서(총무부)에 통보하여 설계(정산)

변경 처리코자 함.

따로 붙임 : 1. 설계변경(정산) 관련 문서 1부.

2. 설계변경 계약금액 조정 검증 확인서(총차) 1부.  끝.