문서번호	도로보수과-5068
결재일자	2019.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
주영진		유태용	05/29 김용제
협조

2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 제2차 작업지시 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5

강서도로사업소

(도로보수과)

2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제2차 작업지시 계획 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2019. 3.14. ~ 2019. 12. 31.

○ 시공업체 : (주)렉스 대표 전현신

○ 도 급 비 : 640,762,640원

□ 작업지시 내역

○ 국민신문고, 현장민원 등 노면표시 재도색

- 위   치 : 구로구 개봉동 139-4 노면표시 재도색 등 7개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 제거 및 재도색  L= 46,429m

○ 교통사고 잦은 곳, 버스중앙차로개선, 자전거도로정비 재배정사업

- 위치 : 화곡본동입구(구 신화곡) 교통사고잦은 곳 개선 등 3개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 제거·도색·재도색  L= 12,817m

· 교통사고 잦은 곳 개선(화곡본동입구) : 교통운영과-8985(’19.5.23)

· 버스중앙차로 개선사업 : 교통운영과-1108(’19.1.21)

· 여의도 자전거도로 정비사업 : 자전거정책과-3642(’19.4.3)

○ 경찰청 규제심의 노면표시 제거 및 도색

- 위  치 : 방화동 799(삼정초교 교차로) 횡단보도이설 등 34개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 제거 및 도색  L= 14,822m

□ 조치계획

○ 위와 같이 현장민원 및 경찰청 규제심의사항과 교통사고 잦은 곳 개선 등 시청 유관부서 예산 재배정 사업에 대하여 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 시공하고 추후 설계변경시 정산처리코자 함.

- 건    명 : 2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제2차)

- 작업위치 : 구로구 개봉동 13-4 노면표시 재도색외 44개소

- 작업기간 : 2019. 05. 31. ~ 2019. 08. 31.

- 개략금액 : 216,266천원(시공 물량에 따라 추후 정산, 관급비 포함)

- 공종 및 물량 : 74,068m

명 칭	품 종	물량	단위	물량	m환산 (15cm)
백색 실선(P4)	도색, 15Cm	1041.15	㎡	6,941	m
백색 파선(P4)	도색, 15Cm	289.35	㎡	1,929	m
황색 실선(P4)	도색, 15Cm	1296.3	㎡	8,642	m
청색 파선(P4)	도색, 15Cm	102.45	㎡	683	m
문자 ∙ 기호(P4)	도색, 15Cm	331.05	㎡	2,207	m
횡단보도(P4)	도색, 15Cm	234.6	㎡	1,564	m
백색 실선(P4)	재도색, 15Cm	792.9	㎡	5,286	m
백색 파선(P4)	재도색, 15Cm	735.6	㎡	4,904	m
황색 실선(P4)	재도색, 15Cm	1507.05	㎡	10,047	m
황색 파선(P4)	재도색, 15Cm	124.2	㎡	828	m
청색 실선(P4)	재도색, 15Cm	154.5	㎡	1,030	m
청색 파선(P4)	재도색, 15Cm	3.6	㎡	24	m
문자 ∙ 기호(P4)	재도색, 15Cm	1425.75	㎡	9,505	m
횡단보도(P4)	재도색, 15Cm	2239.8	㎡	14,932	m
제거(건식흡입수동식)	제거, 15Cm	831.9	㎡	5,546	m

붙 임  1. 작업지시서(수량산출포함) 1부.

2. 개략공사비 1부.

3. 작업지시 설계 도면 각 1부(별도첨부).  끝.