함께해요! 2019 을지태극연습!
		서울특별시
수신	서초구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	서초구 도시텃밭 비닐하우스 개선을 위한 예산변경요청 검토 결과 알림

1. 서울특별시 도시농업과-4001(2019.3.12.)호, 서초구 공원녹지과-13949(2019.5.24.)호 및 서울특별시 도시농업과-8432(2019.5.28.)호  관련입니다.

2. 귀 구에서 제출하신‘서울형 도시텃밭 조성사업 예산변경 요청’과 관련하여 ‘도시텃밭 비닐하우스 개선’의 필요성과 추진방향 등을 검토하고 그 결과를 아래와 같이 안내하오니 사업 추진시 검토결과를 반영하여 업무를 추진하여주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 서울형 도시텃밭 조성사업 예산변경 요청

나. 요청내용 : 예산변경 후 추진하고자 하는 사업의 필요성 및 추진방향

- 사  업  명 : 서초구 도시텃밭 비닐하우스 개선 사업

· 필 요 성 : 시설의 노후화 및 비효율적인 공간활용

· 추진방향 : 노후시설 철거 후 다양한 도시농업 형태 전시 및 시민 공유 공간으로의 도시농업 현대화 시설로 재조성

다. 검토내용

- 필  요  성 : 시설의 노후로 인한 안전상의 문제 및 비효율적인 공간활용에 따른 재조성 필요

- 추 진 방 향 : 다양한 도시농업의 형태를 전시·다수의 시민에게 홍보하는 등 서울형 도시텃밭 조성사업의 취지에 부합

- 예 산 내 역 : 일부 조정 필요

· 기존 하우스 철거를 위해 서울형 도시텃밭 조성 시비 보조금 사용 불허

· 테라스 조정을 위한 관목·초화류 대신 도시농업을 홍보할 수 있는 작물로 대체 식재

※ 관목·초화류 식재 시 시비 예산 사용 불가(추후 정산 시 예산 삭감 예정)

· 휴게시설(의자·피크닉테이블)이 중복되므로 일부 승인

라. 검토결과

- 위에서 검토한 바에 따라, 예산내역 일부 조정 및 식재품목 변경 등을 이행하는 조건하에 도시텃밭 비닐하우스 개선사업 추진을 위한 시설비 및 부대비로의 예산변경을 승인하고자 함

예산구분	예산변경신청액(원)	승인액(원)	비고
설계용역	4,500,000	4,500,000	※ 기 예산편성 내역 인건비 : 18,538,000 일반운영비 : 18,862,000 재료비 : 22,600,000
하우스철거	1,500,000	0
온실설치	38,500,000	38,500,000
테라스조성	12,000,000	10,000,000
내부인테리어	8,500,000	7,000,000
총액	65,000,000	60,000,000

붙 임 : 서울형 도시텃밭 시비보조금 예산변경 요청 검토 보고서 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
★주무관							강명희			도시농업조성팀장					代강명희					도시농업과장					05/29 송임봉
협조자
시행			도시농업과-8436									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 무교로 21 3층 도시농업과 (무교동)															/
전화		02-2133-5346						/전송			02-768-8945					/	gangmaeng@seoul.go.kr												/	부분공개(5)