문서번호	도로보수과-2483
결재일자	2019.5.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
하승환		유재필	05/29 신상식
협조

설계변경(1차) 검토 보고

(2019년 도로손상부분 긴급복구공사-연간단가)

2019. 5. 29.

성동도로사업소

도로보수과

설계변경(1차) 검토 보고

(2019년 도로손상부분 긴급복구공사-연간단가)

연간단가 공사로 공종별 추정 물량이기에 일부 공종 물량 증·감 발생 하여 인한 예산범위 내에서 내역을 조정하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

○ 규    모

- 절삭후덧씌우기 : 124a

- 소규모 인력포장 : 190.5a

- 공동복구 : 130개소

- 야간긴급출동 : 2,340시간

- 부대공 1식

○ 예    산 : *********

*********************************************   ○ 계약금액 : ***************

○ 계 약 자 : ***********

○ 공사기간 : 2019. 3. 15. ~ 2019. 12. 31.

○ 공 정 률 : 38%

□ 보고내용

○ 도로소파, 망상균열 등 포트홀 예상구간의 소규모 포장복구 공종별 정비물량 변경

○ 동공탐사용역 결과 속경성 채움재 요청대상 수량 증가에 따른 물량변경

□ 설계변경내용

○ 주요공종 물량 변경

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
소파포장복구	야간,T=5~20cm, 1a 이하적용	a	5	50	증45	소파포장공종별 실시공 수량에 따른 변경
소파포장복구	야간,T=5~20cm, 2a 이하적용	a	15	60	증45
소파포장복구	야간,T=5~20cm, 3a 이하적용	a	170	19	감151
동공보수작업	야간, 시간당	hr	156	72	감84	동공보수공종별 수량변경
동공보수 (속경성 채움재 주입)	0.12㎥ 기준	개소	52	84	증32

○ 변경금액

공 종	설 계 변 경 금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	2,058,077,870	2,057,528,000	감549,870
도급비	1,354,077,870	1,353,528,000	감549,870
관급자재비	411,000,000	411,000,000	변경없음
이전비	293,000,000	293,000,000	변경없음

□ 건설사업관리 책임기술자 검토의견

○ 한국건설관리공사 도로굴착(1권역)-39(2019.5.27)호 : 시공자가 제출한  설계변경(1회) 내용의 주요반영사항에 대한 수량 및 공사비 산출의 적정여부 검토결과 적정하게 반영되었음

□ 조치의견

○ 건설사업관리책임기술자 적정검토 의견과 예산범위내 설계변경 요청된   사항으로 제비율 검증결과 적정 반영되었는바

○ 건설사업관리책임기술자 의견대로 예산 범위내에서 공종별 물량 증·감에 대하여 설계변경 시행하고자 함.

붙 임 : 1. 설계 변경 내역서 1부

2. 제비율 검증 확인서 1부.  끝.