문서번호	교량안전과-2912
결재일자	2019.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	교량관리팀장	교량안전과장		안전총괄관
김윤희	강천수	김종호		02/25 하종현
협 조

성수대교 보수(도장)공사 발주계획 보고

2019.2.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

성수대교 보수(도장)공사 발주계획 보고

성수대교 정밀안전진단(2016년) 및 정밀점검용역(2018년) 결과 손상된 시설물에 대한 보수․보강으로 시설물의 효용 증진과 공공의 안전을 확보코자『성수대교 보수(도장)공사』발주계획을 수립하여 공사시행에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

- 성수대교 정밀안전진단 용역결과 시설물유지관리계획(교량안전과-23882호, 2016.12.29)

- 성수대교 정밀점검 용역결과 시설물유지관리계획(교량안전과-1886호, 2019.02.08)

Ⅰ		성수대교 현황

□ 위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

□ 시설물 개요

구 분			내 용		구 분	내 용
교 량 명			성수대교		소 재 지	서울특별시 성동구 성수동 ～강남구 압구정동
설계하중			DB-24		공사 기간	복구: 1995.04.20 ∼ 1997.08.14 확장: 1998.12.31 ∼ 2004.12.28
교량 제원		연장	본 선	1,160m	폭 원	본 선	28m～35m
			북단램프	842m		북단램프	7m～10.5m
			남단램프	2,082m		남단램프	7m～10.5m
구조형식	상부	형식	본 선	Truss + Steel Plate Girder	포장	아스팔트포장
			북단램프	S.T.B Girder	내진설계유무	유(내진 1등급)
			남단램프	S.T.B Girder + Steel Plate Girder + R.C 슬래브	신축이음	본선: 뉴모노셀, 강핑거 램프 : Rail Joint
	하부	교각	∏형		교각기초	우물통기초, Pile기초
		교대	역 T형		교대기초	말뚝기초

Ⅱ		성수대교 보수(도장)공사

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 성수대교 보수(도장)공사

❍ 공사기간 : 착공일로부터 270일(9개월)

❍ 총공사비 : 3,970,480천원

- 도급비 : 3,910,130천원

- 이전비 :   60,350천원

❍ 공사개요

- 강재도장 : 22,182㎡(외부도장 17,184㎡, 내부도장 4,998㎡)

- 공중비계 : 21,428㎡

□ 강재도장 추진경위

❍ ̀16. 03. ~  ̀16. 12. : 성수대교 정밀안전진단용역 시행

❍ ̀16.12.29. : 정밀안전진단 용역결과 시설물 유지관리계획

❍ ̀17. 06. ~  ̀17. 11. : 성수대교 보수공사 시행(도장 3,764㎡, 8.4억)

❍ ̀18. 06. ~  ̀18. 12. : 성수대교 보수공사 시행(도장 13,809㎡, 27.9억)

❍ ̀19. 02. 08. : 정밀점검 용역결과 시설물 유지관리계획

□ 공사 위치도 및 현황 사진

❍ 공사 위치도

❍ 현황 사진

강재 도장박리(남단 B램프 외부)	강재 도장박리(남단 D램프 외부)
강재 도장박리(남단 A램프 내부)	강재 도장박리(남단 A램프 내부)

□ 사업내용 검토

❍ 현  황

- 남단램프교 거더 내․외부에 대한 도장박리 현상이 빠르게 진행중에 있어 시설물의 내구성 및 사용성 확보가 시급함

<당초 사업계획 및 편성예산>

․ 강재도장 : 15,500㎡(사업비 33.1억원)

․ 교면포장 : 50a(사업비 6.6억원)

<정밀점검용역결과(18년 12월 준공)>

․ 남단램프 강재도장 보수대상 : 33,015㎡(사업비 70억원)

▶ 외부도장 21,990㎡, 내부도장 11,025㎡

․ 교면포장 보수대상 : 141.8a(사업비 15억원)

▶ 아스팔트 포장파손, 단면복구, 배수구 막힘, 조류배설물 청소 등

❍ 문제점

- 공용연수 증가와 최근 남단램프에 대한 강재부식 및 도장박리 면적이 급격히 늘어나, 시설물의 내구성 및 사용성 증진과 공공의 안전성 확보가 필요함

- 도장탈락으로 인한 도시미관저해요인으로 빈번한 민원발생

□ 조치계획

❍ 강재부식 및 도장박리가 심한 남단램프에 대하여 사업의 시급성 및 연속성과 민원해결 차원에서 2019년도에 강재도장을 우선적으로 시행하고(1순위)

❍ 교면포장, 조류배설물 청소 등은 전체 구조물의 안전에 즉각적인 영향을 주거나 시민의 안전에 위해를 주는 중대결함 사항이 아니므로, 2019년 당초예산(포장 6.6억원)을 강재도장공사비로 사용하고 교면포장 등은 2020년 예산을 확보하여 시행(1순위)

❍ 손상 내용별 보수․보강 사업중 긴급한 보수가 필요하지 않는 대상에 대하여는 지속적 관찰 시행(2,3순위)

※ 관련근거

- 성수대교 정밀점검 용역결과 시설물유지관리계획(교량안전과-1886호, 2019.02.08.)

- 사업예산 운영기준 : 예산편성 산출근거 확정은 내부관리

․ 2019년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 별표 13(예산사업 운영기준, 행정안전부 훈령)

․ 2019년도 예산편성 잠정기준(서울특별시, 2018.6.)

- 우선순위 결정기준 : 1순위 2년 이내 보수

․도로시설물 보수․보강 우선순위 선정기준(도로시설과-15861, 2014.9.10)

․교량 보수․보강사업 투자 우선순위 결정기준 보완(교량안전과-11133, 2015.6.19)

❍ 변경사항

구 분	예산기준		발주기준		비 고
	물 량	소요액(억원)	물 량	소요액(억원)
강재도장	15,500㎡	33.1	22,182㎡	39.7	́19년시행
교면포장	50a	6.6	-	-	́20년시행

□ 공사발주방법

❍ 도장공사비 : 3,970,480천원

❍ 입찰방식 : 제한경쟁입찰(실적제한)

❍ 입찰참가자격

- 건설산업기본법시행령 제7조에 의거 도장공사업으로 등록된 업체

- 입찰공고일 전일 기준 최근 10년 이내 준공검사가 완료된 단일 건으로 도로법 제10조에 따른 도로 중 고속국도, 일반국도, 특별시도·광역시도, 지방도, 시·군·구도에 설치된 교량(철도교량 포함) 중 강교도장 7,300㎡이상 준공실적을 보유한 업체(공동수급체 구성성원 중 어느 하나의 구성원이 보유한 경우 가능)

- 지역의무 공동도급 대상 공사이므로 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 서울특별시에 주된 영업소를 둔 자를 반드시 구성원으로 하여야 하며, 지역업체의 시공참여비율은 49%이상이어야 하고 지역업체와 그 외 지역업체간에는 상호출자제한기업집단과 그 계열회사 관계가 아니어야 함(단, 서울특별시 소재 업체 또는 서울특별시 소재업체로만 분담이행방식의 공동수급체 구성 시에는 단독참여 가능)

- 공동수급체의 구성원 수는 대표사 포함 2개사 이내로 하며 공동수급체 구성원의 계약참여 최소 지분율은 5%이상이어야 하고 대표자는 분담내용의 비중이 큰 업체로 선임

□ 기타

❍ 도장공사 중 강재표면처리(외부, SSPC-SP10, Shot blast) 공정은 대가산정 기준이 명확치 않아 적정단가 산출이 곤란 하므로 사후 실사하여 원가검토 조건부로 계약코자 함(입찰공고문에 명시)

※ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제89조(사후 원가검토 조건부 계약)

❍ 하자담보책임기간

도장공사 하자담보 책임기간 : 3년

※ 관련근거 : 공종별 하자담보 책임기간

- 건설산업기본법 제28조 제3항, 같은법 시행령 제30조에 의하여 공사목적물의 성능, 특성 등을 고려하여 대통령으로 정하는 바에 따라 도급계약서에서 특별히 따로 정함.

□ 향후계획

❍ ̀19. 2 : 계약심사 요청 및 일상감사 의뢰

❍ ̀19. 3 : 공사발주, 계약 및 착공

❍ ̀19.11 : 공사준공

붙임 : 강재도장 위치도 1부.  끝.