투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	운영기획과장
(경유)
제목	잠실종합운동장,구의야구공원 조경시설정비공사 폐기물처리용역 준공기한 연기 의뢰

1. 시설개선과-4999호(2019.05.29.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행 중인 폐기물처리용역에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명: 잠실종합운동장·구의야구공원 조경시설정비공사 폐기물처리용역

나. 계약업체: **************************

다. 계약금액: ***************************

라. 용역기간: 2019.03.11. ~ 05.30.

마. 용역개요: ***********************************************************

바. 준공기한 연기

*********************************************************

- 귀책소재 : 발주처(체육시설관리사업소)

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 변경기간

구 분	당초 준공기한	변경 준공기한	비 고
공사기간	2019. 03. 11. ~ 05. 30.	2019. 03. 11. ~ 06. 10.

아. 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 노후체육시설개보수사업, 2019년 제100회 전국체전 대비 시설개선, 시설비(100-401-01)

붙임  1. 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	시설개선과장
주무관	안현미		주무관	이영교		시설개선과장	05/29 윤정한
협조자
시행	시설개선과-5016	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 잠실종합운동장	/
전화	2240-8791	/전송	2240-8777	/	ahmland@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)