문서번호	시설개선과-4999
결재일자	2019.5.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
안현미		이영교	05/29 윤정한
협조

준공기한 연기보고

(잠실종합운동장 구의야구공원 조경시설 정비공사 폐기물처리용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5

체육시설관리사업소

[시설개선과]

『잠실종합운동장·구의야구공원 조경시설 정비공사 폐기물 처리용역』

준 공 기 한  연 기 보 고

『잠실종합운동장·구의야구공원 조경시설 정비공사 폐기물처리용역』업무수행중 아래와 같이 공사기간 연기 사유가 발생하여 준공기한을 연기하고자 함.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명: 잠실종합운동장·구의야구공원 조경시설 정비공사 폐기물 처리용역

□ 용역기간: 2019. 03. 11. ~ 05. 30.

□ 계약업체: ***********************, ********************, ***********************

□ 계약금액: ************

□ 용역개요: ***********************************

*************************

Ⅱ		보고내용

□ 용역 준공기한 연장

❍ 공사기한을 2019. 05. 30일에서 2019. 06. 10일로 연장

❍ 연장사유

- 본 공사(잠실종합운동장·구의야구공원 조경시설 정비공사) 준공기한이 2019.06.04.로 현장정리에 발생하는 폐기물처리를 위해 기간 연장 검토

❍ 귀책소재: 발주처

❍ 지체상금: 미부과

Ⅲ		조치의견

□ 준공기한 연장

❍ 당 초 : 2019.03.11. 변경후 : 2019.05.30.

❍ 변경: 2019.03.11. ~ 2019.06.10일까지 준공기한을 연기하여 잠실종합운동장·구의야구공원 조경시설정비공사 진행에 만전을 기하고자 함.  끝.