투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	‘노들섬 특화공간 조성 기계설비공사'(총차 및 2차정산) 계약변경 의뢰

우리 본부에서 시행 중인‘노들섬 특화공간 조성 기계설비공사’와 관련, 설계변경 사항에 대하여

아래와 같이 계약 변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공   사   명  : 노들섬 특화공간 조성 기계설비공사(총차,2차)

2. 계   약   자  : ********

3. 계약 변경 내용

가. 계약변경 금액

구 분	도급비(원)			계약기간
	당 초	변 경	증․감
총 차	2,265,109,320	2,272,609,320	증 7,500,000	2017.12.8.~2019.8.31. 변경없음
2 차	1,476,480,000	1,461,560,000	감14,920,000	2018.5.28.~2019.5.31. 변경없음

나. 설계변경 사유  ▻ 총  차 : 운영부서 요청에 의한 내부 평면 변경사항 반영

▻   2   차  :          〃  및 준공관련 보험료 등 정산 반영

4. 예산과목 : 공공재생과, 공공재생계획수립, 공공개발 및 공공공간 확충(도시개발)

노들섬 문화명소 조성사업, 시설비 및 부대비, 시설비

따로 붙임 1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 책임건설사업관리기술자 설계변경 검토 보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 등(총차,2차,계약금액검증서,합의각서 포함) 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박경철		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	05/29 임정규
협조자
시행	설비부-7892	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	부분공개(5)