문서번호	관리단속과-5214
결재일자	2019.5.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장
강혜지		05/29 박영종
협 조
	주무관			오환섭

청사 전기안전관리대행 용역 변경계약 보고

2019. 05.

성동도로사업소

(관리단속과)

청사 전기안전관리대행 용역 변경계약 보고

우리사업소 태양광발전설비 증설에 따라 2019년 청사 전기안전관리대행 용역계약을 설비용량에 맞게 변경하여 유지관리 하고자 보고드림.

□ 관련근거

○ 전기사업법 제73조 및 같은법 시행규칙 제40조(전기안전관리자의 선임 등)

○ 기전과-2516(2019.5.27.)호 전기안전관리자 선임신고사항 변경신고 요청

□ 계약현황

○ 계 약 명 : 2019년 청사 전기안전관리대행 용역

○ 계약기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.(12개월)

○ 계약업체 : *******************

○ 계약금액 : 2,034,900원

○ 설비규모 : 수전설비 22,900V 300kVA, 발전설비 50kW

□ 설비변경 현황

수배전설비	발전설비
○ 수전반 1면 신설 - MOLD MOF 2대(수전⋅역송용) - VCB(520MVA) 1대 ○ 옥외 배전반 1면 신설 - 변압기(22.9kV/380-220V 250kVA) 1대 - ACB(50kA) 1대	○ 태양광발전설비 신설 - 모듈 : 141.12kW(360W×392매) - 인버터 : 3φ4W, 380V, 75kW×2대

□ 계약내용 변경(※계약기간은 동일)

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증, 감
용 역 비	2,034,900	2,667,450	증)632,550
용역규모	수전설비 : 300kVA 태 양 광 : 50kW	수전설비 : 300kVA 태 양 광 : 191.12kW

※ 사업소 태양광 발전설비 증설에 따른 청사 전기안전관리대행 용역비 증액 조정(태양광발전 50kW → 191.12kW)

□ 예산과목

○ 안전총괄실(도로관리과), 행정운영경비, 기본경비, 기본경비(도로사업소6개소), 공공운영비(201-02)

□ 향후일정

○ 변경계약 체결 의뢰               : 2019.  5. 31.

○ 태양광발전설비 설치공사 준공예정 : 2019.  6. 19.

○ 청사 전기안전관리대행 용역 준공  : 2019. 12. 31.

붙임  변경산출내역서 1부.  끝.