＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	“광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계” 차수 과업기간 변경 의뢰

1. 배수과-5111호(2019.05.29)와 관련입니다.

2. 「광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 차수 과업기간을 아래와 같이 변경의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역

- 계 약 자 : **************

- 계약금액 : **********************************

나. 차수 과업기간 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
총차(전체분)	`18.07.31.~`19.12.31.	`18.07.31.~`19.12.31.	변경없음
1 차 수	`18.07.31.~`19.05.31.	`18.07.31.~`19.07.31.	61일 연기

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 광암수계 배수관로 정비용역의 내실 있는 설계를 위한 관내부 직접조사 및 과업 구간내 진행중인 도로 기반시설 개선사항 등을 본 용역 기본설계에 반영하기 위한 소요기간 필요

따로붙임  1. 차수 과업기간 변경보고 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	배수과장
주무관	박상열		배수과장	05/30 이승완
협조자
시행	배수과-5151	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)