	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	차고 출동환경 개선 홀로그램(전광판) 설치장소 변경 계획알림

1. 관련근거

가. 소방행정과-5579(2019.4.19.)“강남소방서 재난출동 환경개선 계획”

나. 소방행정과-6507(2019.5.10.)“홀로그램 제작·설치 공사 계약 결과 보고”

다.  소방행정과-7443(2019.5.30.)“차고 출동환경 개선 홀로그램(전광판) 설치장소 변경 계획보고”

2. 강남소방서 재난출동 환경개선을 위한 홀로그램 제작·설치 공사에 대하여       소방홍보 및 원활한 출동을 최대화 하기 위하여 설치장소 변경계획을 다음과     같이 알리니 영동119안전센터장(팀장)은 설치감독 및 사후관리에 철저를 기하기

바랍니다.

가. 사 업 명 : 강남소방서 홀로그램 제작·설치 공사

나. 공사기간 : 2019. 5. 14.(화) ~ 6. 11.(화)

다. 변경내역

사업명	설치위치		변경사유
	변경 전	변경 후
홀로그램 제작․설치	강남소방서 본서	영동119안전센터	- 펌프차 및 구급차 출동건수 감안 - 청사 앞 유동인구(맞은편 CGV 위치) - 청사 앞 차량통행량 등이 많은 곳에 설치하는 것이 효과적(왕복 12차로)

라. 설 치 일 : 2019. 6. 5.(수) 예정

마. 설치위치 : 구급차 차고문(출입구 옆) 상부

바. 감 독 자 : 영동119안전센터 1, 2, 3팀장

사. 검 수 자 : 장비회계팀장, 계약담당

아. 검수방법 : 공사내역 점검 및 관능검사

붙임 : 홀로그램 설치 위치 변경(안) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	각 과, 현장대응단, 각 안전센터
담당자	전윤재		장비회계팀장	오주형		소방행정과장	전결 05/30 최홍균
협조자
시행	소방행정과-7456	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 소방행정과 (삼성동)	/
전화	02)6981-7421	/전송	02)566-5695	/	arodri@seoul.go.kr	/	부분공개(5)