문서번호	하천관리과-3327
결재일자	2019.3.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
최병희	백성현	代박홍봉		03/11 이정화
협 조
	방재시설부장		이임섭

흑석빗물펌프장 이전

기본 및 실시설계용역 시행 보고

2019. 3.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「흑석빗물펌프장」기본 및 실시설계용역 시행보고

빗물펌프장 방재성능을 우리시 목표인 30년빈도로 확충하고 역세권 개발중심지역에 위치, 도시미관저해 및 악취발생으로 주민불편이 있는 흑석빗물펌프장을 이전 증설하기 위한 기본 및 실시설계용역 시행계획을 보고 함.

Ⅰ		추진경위

○ 2005. 5 : 펌프장(1968년 설치) 이전방안 검토

○ 2007. 7 : 흑석빗물펌프장 도시계획시설(유수지) 결정고시

○ 2008. 9 : 흑석재정비촉진계획 결정고시/흑석1구역 추진위원회 구성

- 이후 부동산 경기하락, 주민반대 등으로 향후 사업추진 불투명

○ 2017.11 : 펌프장이전 타당성 조사용역 준공

○ 2018.11 : 기술용역타당성 심사

○ 2019.  1 : 건설기술용역 사업수행능력평가기준 협의(기술심사담당관)

○ 2019.  2 : 건설기술(용역발주)심의 (기술심사담당관)

※ ‘흑석1구역 재정비촉진계획 변경(펌프장 제척) 수립용역’ 추진중(주거사업과)

Ⅱ		사업개요 및 추진방안

○ 대 상 : 흑석빗물펌프장(동작구)

○ 시설현황

자치구명	펌프장	구분	위 치	설계빈도 (년)	토출량 (㎥/min)	유역면적 (ha)	관련하천
동작구	흑석	기존	흑석동 103-2	10	840	121	한강
		이전	흑석동 1-2번지일대	30	1,760	121	한강

○ 필 요 성

- 흑석빗물펌프장은 10년 빈도로 서울시방재성능 목표기준인 30년 빈도 상향 필요

-  역세권인 흑석뉴타운 지역에 위치하여 미관저해와 악취발생등으로 주민불편이 발생하여 흑석1구역 재정비촉진구역에서 제척 예정

○ 사업비 : 64,020백만원

(공사비 37,542, 보상비 22,585, 용역비 3,893)

○ 사업추진방안(업무협업)

구 분	추진기관(부서)	업 무	비고
설계용역	물순환안전국 (하천관리과)	- 기본및실시설계용역발주 기본설계 예산확보
	도시기반시설본부 (방재시설부)	- 실시설계
공사 및 감리용역	물순환안전국 (하천관리과)	- 예산확보
	도시기반시설본부 (방재시설부)	- 공사발주 - 감리용역 발주
보 상	물순환안전국 (하천관리과)	- 보상예산 확보 및 국유지 사용 협의
	동작구 (건설관리과)	- 보상계획 수립 및 시행
기 타	물순환안전국 (하천관리과)	사전재해영향평가(협의)
	동작구	도시계획시설결정

※ 도시계획시설결정(방수설비)은 구청장 입안 및 결정사항

- 서울특별시 도시계획조례 제68조 별표4(13번 방수설비 전체)

Ⅲ		용역 시행계획(안)

□ 과업개요

○ 위치 : 동작구 흑석동 1-2                번지(원불교 회관옆)

○ 면적 : 7,353㎡

(국공유지 4,516, 사유지 2,837)

○ 규모 : 펌프설치 808HP×1대,               1,280HP×4대

○ 용역비 : 1,400백만원

□ 과업내용

○ 유역단위 종합적인 방재시설 검토 및 설계

- 홍수량 산출 및 유입․토출관로, 배수펌프 용량 검토

- 유역 분리, 저류조, 관거 개량 등 방재시설 확충방안 검토

- 유입관거 통수능 검토 및 정비계획 수립

○ 30년 빈도의 용량 확충

- 펌프장 시설용량 30년 빈도 시설개선

- 적정 시설규모 검토 및 시설물 배치, 최신의 설비구축 등

Ⅳ		발 주 방 법

○ 입찰방법 : 일반경쟁

○ 낙찰자선정 : 적격심사

○ 계약방법 : 공동계약(3개 업체 이하)

○ 용역기간 : 2019. 5. ～ ‘20. 4.(용역기간 360일)

○ 참가자격

가. 입찰공고일 현재 엔지니어링산업진흥법 제21조 및 같은 법 시행령 제33조의 규정에 의거 건설부문 중 (수자원 개발, 상하수도, 토질․지질, 구조 분야) 엔지니어링 업체등록을 필하고 해당분야별 기술자를 보유한 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 건설분야(수자원개발, 상하수도, 토질․지질, 토목구조), 전기전자부문(발송배전, 건축전기), 기계부문(산업기계, 건설기계)의 기술사 사무소를 개설 등록한 업체

나. 전력기술관리법 제14조 규정에 의한 종합 또는 전문1종 전력시설물 설계업에 등록된 업체.

다. 토질조사는 공동도급(분담이행방식)으로 수행하여야 하며, 공동수급체 수에 포함되지 않음(사업수행능력 평가에서 제외)

라. 서울시에 주된 영업소가 있는 업체와 공동도급으로 참여시 행정자치부 예규「지방자치단체 입찰시 낙찰자결정기준」에 의거 지역업체 참여도 점수 부여

Ⅴ		향후 계획

○ 2019. 03 : 사전규격(과업내용서) 공개

○ 2019. 03 : 용역발주 의뢰

- 사업수행능력 평가(PQ) 및 입찰대상자 통보(하천관리과→재무과)

○ 2019. 04 : 가격입찰 및 낙찰자 선정(계약)

○ 2020. 05 : 용역착수

○ 2020. 04 : 용역준공

붙임 : 1) 빗물펌프장 위치도  1부.

2) 과업내용서(기술심의 완료) 1부.

3) 사업수행능력평가기준(기술심사담당관 협의 완료) 1 부.

4) 용역비 타당성 심사 내역서 1부.  끝.