문서번호	보행정책과-3721
결재일자	2019.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	보행안전팀장	보행정책과장
유용식	윤복철	03/14 박태주

중랑구 어린이 보호구역 LED표지판 설치계획

2019. 3.

보 행 정 책 과

(보행안전팀)

중랑구 어린이 보호구역 LED표지판 설치계획

중랑구 어린이 보호구역 초등학교 주변 교통표지판을 LED표지판으로 교체 하여 교통사고의 위험으로부터 교통약자를 보호하고자 함

※ 방침 보행정책과 -300(2019. 1. 8.)호

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 어린이 보호구역 초등학교 주변 LED표지판 설치

○ 사업대상 : 중랑구 193개소

○ 사 업 비 : 500백만원(시비)

○ 사업내용

- 학교주변 보호구역 진출입부, 주요 결절지점 등에 교통표지판(가로형, 세로형 통합표지 등)을 LED표지판으로 교체 설치

□ LED 표지판 교체 설치계획

○ 사업대상 : 망우초외 23개교 193개소(붙임참조)

○ 사업기간 : 2019. 3월 ~ 6월

○ 사업시행 : 중랑구에서 시행(조달구매하여 교체설치)

○ 재정지원 : 보행정책과(예산재배정 및 사업시행 관리)

○ 사업내용

- 초등학교주변 보호구역 진출입부, 주요 결절지점 등에 가로형통합표지, 세로형통합표지 등 교통표지판을 LED표지판으로 교체 설치

○ 세부 일정계획

- 예산 재배정            : 3월중

- 자재조달구매           : 3월중

- LED표지판 교체 설치  : 4~6월

□ 행정사항

○ 예산 재배정 및 사업완료시 정비결과 보고

붙임 1. LED표지판 교체사업 대상지 1부.

2. 정비결과 보고(제출서식) 1부. 끝.

붙임1	LED표지판 교체사업 대상지

○ 사업 대상지 내역

연번	시 설 명	소 재 지	개소	사업비(천원)
1	망우초등학교	중랑구 망우로72길 49	11	30,260
2	면남초등학교	중랑구 면목로30나길 38	4	8,880
3	면동초등학교	중랑구 면목로57길 32	12	31,020
4	면북초등학교	중랑구 용마공원로5길 32	9	22,900
5	면중초등학교	중랑구 용마산로70길 43	5	11,100
6	신내초등학교	중랑구 용마산로125나길 22	16	44,280
7	중곡초등학교	중랑구 면목로23길 20	7	22,840
8	중랑초등학교	중랑구 봉우재로6길 26	9	22,900
9	중화초등학교	중랑구 신내로7가길 22	9	19,980
10	면일초등학교	중랑구 용마산로100길 13	11	28,800
11	목동초등학교	중랑구 동일로138길 27	9	19,980
12	상봉초등학교	중랑구 동일로126가길 11	9	21,440
13	신묵초등학교	중랑구 동일로149길 46	10	25,120
14	동원초등학교	중랑구 송림길 114	10	23,660
15	면목초등학교	중랑구 면목로 434	6	17,700
16	봉화초등학교	중랑구 신내로15길 110	9	23,840
17	신현초등학교	중랑구 봉화산로 188	5	11,500
18	원묵초등학교	중랑구 숙선옹주로 109	8	18,400
19	금성초등학교	중랑구 신내로21길 55	7	20,810
20	중목초등학교	중랑구 동일로 665	9	23,840
21	중흥초등학교	중랑구 봉화산로 82	9	23,840
22	목현초등학교	중랑구 동일로157길 75	5	13,070
23	새솔초등학교	중랑구 신내역로1길 164	4	10,770
	조달수수료			3,070
계			193	500,000

붙임2	정비결과 제출서식

사 업 명 : ~

(00구)

□  사업개요

○ 사 업 명 : 00초등학교 주변 ~ 정비사업

○ 사업기간 : 2019. 00. 00. ~ 00. 00.

○ 사업위치 : ~ 초등학교 주변

○ 사업규모

- LED표지판

○ 사업예산 :      백만원

○ 사업내용 :

보호구역명	사업위치	정비유형	세부사업내용
초교

□  사업비 현황

○ 사업비 집행내역

구 분	예 산 액 (원)	집 행 액(원)		집행잔액 (원)
		금액(원)	비율(%)
시비

□  사업위치도

□  사진(전·후)

공사(전)	공사(후)