＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(1차) 계약의뢰(2018년 망우본동외 8개동 상수도공사-2차)

우리 사업소에서 시행중인『망우본동외 8개동 상수도공사-2차』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행하고 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2018년 망우본동외 8개동상수도공사-2차(장기계속단가계약)

나. 계약상대자: ************

다. 계약기간: 2019.1.16. ~ 2019.6.30.

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 공사비	***********	***********	*
도 급 비	***********	***********	*
관급자재비	***********	***********	*

라. 설계변경 금액 내역                                                    (단위:원)

마. 계약금액 변경사유: 계약 물량 증․감 및 신규공종 발생

바. 공사개요: D=13~300mm, L=1,099m

사. 예산과목

1). 상수도사업비용,영업비용,급수공사비,신설공사비

2). 상수도사업비용,영업비용,배급수비,기타교체비(불용관정비)

3). 상수도사업비용,영업비용,배급수비,상하수도관교체비(교체장애 수전정비)

4). 상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(수도계량기보호통 보온재등  정비)

5). 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(간선배관공사)

붙임: 설계변경 내역서 및 관련문서 각1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	홍민표		주무관	김대용		시설관리과장	05/30 천성훈
협조자
시행	시설관리과-13037	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동) 동부수도사업소	/
전화	02-3146-2798	/전송	02-3146-2839	/	hihpyo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)