문서번호	도시철도계획부-4713
결재일자	2019.5.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획과장	도시철도계획부장
이경훈		김동철	05/30 代김동철
협조

「쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보 방안」

용역 준공기한 연기 검토 보고

2019. 5.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

「쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보 방안」

용역 준공기한 연기 검토 보고

「쉴드 TBM 활성화를 위한 경제성 확보방안 용역」의 준공기한 연기에 대해 검토한 보고임

[관련근거 : 한터지학 제2019-189호(2019.5.28.)]

□		용역개요

❍	용역명	:	쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보방안
❍	계약자	:	(사)한국터널지하공간학회
❍	계약기간	:	′18. 6. 1. ~ ′19. 5. 31.
❍	계약금액	:	184,651,000원
❍	과업내용	:	쉴드TBM 현황 및 국내․외 동향분석 쉴드TBM 장비 및 부품 경제성 확보방안 수립 쉴드TBM 세그먼트 경제성 확보방안 수립 쉴드TBM 최적공사비 산출기준(안) 마련

□		추진현황

❍	'18.03.30	:	용역시행방침 수립 및 기술용역 타당성 심사
❍	'18.06.01	:	용역계약 체결
❍	'18.6~'19.2	:	용역착수 및 월간공정보고(6회)
❍	'19.03.28	:	용역 중간보고회

□		보고내용

(연기사유)

❍ 장비비, 세그먼트 제작비, 굴진공사비 등 분야별 경제성 확보방안에 대해 관련업체 및 기관 등과의 공론화를 위한 추가 소요기간 필요.

❍ 학회의 추계학술대회를 통해 용역결과를 공론화하고, 공론화 과정에서 도출되는 이견에 대해 이해설득, 용역결과 보완 등으로 최적의 용역결과가 도출될 수 있도록 추계학술대회 일정(‘19.10월)을 감안하여 용역기간을 연장 하고자 함.

□ 기간연장 개요 □

-	연기일수	:	183일
	당초) ‘18.6.1.~‘19. 5.31. → 변경) ‘18.6.1.~‘19.11.30.
-	귀책소재	:	도시기반시설본부
-	지체상금	:	미 부 과
-	연기사유	:	용역결과에 대한 관련기관과의 논의 및 공론화를 위한 소요기간 반영

□		조치계획

❍「쉴드 TBM 활성화를 위한 경제성 확보방안 용역」을 아래와 같이 변경계약 의뢰하고자 함.

구 분	당 초	변 경	증․감
용 역 비	184,651,000원	184,651,000원	변경없음
용역기간	‘18.06.01~‘19.05.31	‘18.06.01~‘19.11.30	183일 연장

붙임 : 용역 중간보고 검토의견에 대한 조치계획(공기연장) 1부.  끝.