문서번호	토목부-9539
결재일자	2019.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
김종혁	김동현	김영수		05/30 이택근
협 조

설계용역 착수보고회 개최 결과 보고

(헌릉로 확장 기본 및 실시설계)

2019. 5.

도시기반시설본부

토목부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

설계용역 착수보고회 개최 결과 보고

[헌릉로 확장 기본 및 실시설계]

SRT 수서역 및 위례신도시, 강남·세곡2 보금자리 등 헌릉로 일대 주변지역 대규모 개발에 따른 병목구간의 상습 지정체 해소 및 ‘헌릉로 중앙버스전용차로’ 설치여건 마련을 위해 추진하는 “헌릉로 확장 기본 및 실시설계용역”에 대한 착수보고회 결과를 보고 드림

1	사업개요

○ 사 업 명 : 헌릉로 확장 기본 및 실시설계

○ 규    모 : · 도로확장 : 1.3km (왕복 6차로→왕복 10차로)

· 연결로 신설 : 0.5km(내곡IC, 1차로)

○ 설계기간 : '19.3.25. ~ '19.12.24.

○ 설계금액 : 681,890,000원

○ 설 계 사 : ㈜삼안, ㈜에이스톤엔지니어링

○ 위 치 도

2	추진경위

○ '14.06. ~ ’16.03. : 타당성 조사 및 기본계획

○ '17.05.26. : 투자심사 완료

○ '19.05.15. : 착수보고회(도로계획과 주관)

○ '19.05.27. : 헌릉로 확장 기본 및 실시설계 시행 요청 (도로계획과 → 토목부)

3	착수보고회 개요

○ 안  건 : 헌릉로 확장 기본 및 실시실계

***********2019. 5.29.(수) 09:30

****장  소 : 도시기반시설본부 13층 건축부 회의실

****참석자 : 시설국장, 토목부장, 토목설계과장, 분야별(조경,설비) 담당자, 설계사

****보고자 : 용역사업책임자(㈜삼안 이종철 전무이사)

****보고내용

- 과업개요 및 과업수행계획

- 전차용역(타당성조사 및 기본계획)검토 및 추진방향

- 중점 검토사항 등

4	주요 의견

****헌릉교 확장시 세곡천 하천기준에 맞춰 검토하고 기존 교량(DB-18)과 기 확장된 교량(DB-24)의 교량 성능기준 확보에 대해 전체적으로 재검토할 것

****현재 도시계획선으로 확보되어 있는 폭(50m)은 도로부지로 확보하되 8차로 또는 10차로의 필요 유무는 헌릉로 병목구간의 상류부 하류부 차로수에 따라 적절한 확장폭을 검토할 것

****내곡IC의 추가 연결로 설치는 교통량 분석 및 관련 민원을 검토한 후 세부적으로 설계하고 다른 방향도 연결로 필요성에 대해 검토할 것

****헌릉IC 부근(Sta.0+600 ~ Sta.0+800)의 차로수 확장에 따른 보상 여부를 상세히 검토후 추진할 것

****헌릉로 432길(Sta. 0+500)의 진출입계획에 대해 검토하고 마을 진출입로의 단절 또는 이설 계획에 대해 상세히 검토할 것

****병목구간인 헌릉IC 구간은 최소 8차로 이상 확보하여 병목구간이 발생하지 않도록 하고 10차로 확보시 헌릉IC의 지장물 등을 상세히 확인하고 추진할 것

****중앙버스전용차로(BRT) 계획을 반영하여 추진할 것

5	향후 추진계획

○ ’19.05. ~ ’19.10. : 기본 및 실시설계

○ ’19.10.     : 실시설계 기술심의

○ ’19.12.24. : 설계 완료

붙임 : 착수보고  자료 1부.  끝.